문서번호	도로보수과-10467
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최정필		11/21 이규철
협조
	주무관		이상하

2014년 불량맨홀 정비공사 설계변경(2회) 시행계획 보고

2014.11.

2014년 불량맨홀 정비공사

설계변경(2회)에 따른 보고

2014년 불량맨홀 정비공사 공사업무 수행 중 설계변경 사유가 발생하여

공사 시행에 만전을 기하고자 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 불량맨홀정비공사(연간단가)-서부

○ 공사기간 : 2014.03.28 ∼ 2015.02.28.

○ 계 약 자 : 대실테크(주) 대표 유조웅

○ 도 급 비 : 525,613,000원

□ 설계변경 사유

○ 관내 시도상 맨홀중 포장면 단차등 정비가 시급한 불량맨홀 정비공사를 위하여

부득히 본공사 낙찰차액을 사용함에 따른 도급비 증액 및 물량증감 발생에

따른 설계변경 시행(도로보수과-10223(2014.11.14.)호:낙찰차액 사용계획 보고)

○ 당초 건설폐기물 처리를 위한 이전비(10,000천원)를 확보하였으나 건설폐기물이       소량으로 계약업체에서 자체처리함에 따라 도급비(본공사)에 포함하여 설계       변경 시행

□ 변경내용(당초 522개소 → 변경 595개소, 증 : 73개소)

공 종	규 격	당 초(개소)			변 경(개소)			비고
		계	주간	야간	계	주간	야간
		522	57	465	595	60	535
불량맨홀 보수	하수 D648	120	16	104	173	16	157
	상수 D648	98	10	88	113	12	101
	통신 등 D766	117	9	108	154	10	144

	통신 등 D918	90	6	84	98	6	92
	통신 등 D1108	31	5	26	12	5	7
	통신 등 사각 1080×580	30	5	25	17	5	12
	소형 D250	36	6	30	28	6	22

따로붙임  1) 설계변경 내역서 1부.

2) 낙찰차액 사용계획 보고 1부.  끝.