문서번호	건축부-13979
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
신현성		양기정	11/21 김우성
협조

『장충체육관 리모델링공사 전면책임감리용역』

총차 및 3차분 계약변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부 건축부

『장충체육관 리모델링공사 전면책임감리용역』

총차 및 3차분 계약변경 시행 보고

본부장방침 건축부-10388호(2014.8.25.)호 감리 투입분에 대한 장충체육관 리모델링공사 전면책임감리용역 총차 및 3차분 계약변경 시행을 보고

1		용역개요

○ 용  역  명 : 장충체육관 리모델링공사 전면책임감리용역

○ 총용역기간 : 2012.04.04~2014.12.31 (3차 : 2014.01.25.~2014.12.31)

○ 총계약금액 : 1,699,030천원(3차:644,030천원)

○ 계  약  자 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 외 1개사

2		추진경위

○ 2012. 04. 04 : 전면책임감리용역 계약 및 착수

○ 2013. 05. 10 : 1차분 용역 준공

○ 2013. 05. 11 : 2차분 용역 착수

○ 2013. 09. 09 : 사업계획변경(행정1부시장 방침)

- 시설안전 강화, 관람객 편의시설 개선, 공연인프라 확보 및 지붕재 개선 등

○ 2013. 09. 13 : 공사계약기간 변경 (2013.12.31 → 2014.06.02)

○ 2013. 12. 06 : 책임감리기간 변경계약(2013.12.31 → 2014.06.02)

○ 2014. 01. 03 : 공사기간 3차 계약

○ 2014. 06.10 : 책임감리기간 변경계약(2013.06.02 → 2014.08.31)

- 설계의 적정성 검증(철골공사 등)을 위한 전문가 자문 및 설계반영 기간소요

○ 2014. 07. 24 : 공사기간 변경계약 (2014.08.31. → 2014.12.31)

- 구조 변경(이웃링 H빔 → 파이프링)에 따른 제작 및 설계기간 소요

○ 2014. 07. 30 : 감리계약기간 변경 (2014.08.31 → 2014.12.31)

○ 2014. 08. 25 : 안전관련 감리투입 본부장 방침 (건축부-10388호)

○ 2014. 11. 17 : 총차 및 4차 계약의뢰 (증액 38,300천원-안전감리 추가))

○ 2014. 11. 20 : 총차 및 변경 계약보고(감리투입(구조분야등)추가 금액변경 없음)

3		총차 및 차수분 계약변경

(단위: 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감	비고
감리용역기간	총차	2012.04.04. ~ 2014.12.31	2012.04.04. ~ 2014.12.31	0
	3차	2014.01.25. ~ 2014.12.31	2014.01.25. ~ 2014.12.31	0
	4차	2014.09.12. ~ 2014.12.31	삭 제
감리비 계약금액	총차	1,699,930,000	1,737,330,000	38,300,000
	3차	644,030,000	682,330,000	38,300,000	안전 구조감리 추가
	4차	38,300,000	삭 제

4		검토 및 처리의견

○ 4차 계약부분을 모두 3차 계약변경으로 하여 금액 증액분 38,300천원은 기

보고사항과 같이 일반회계비에서 지출 및 계약부서인 재무과 계약변경 의뢰함.

(일반회계 – 도시기반시설본부, 도시기반시설관리(일반회계), 공사장 안전관리

대책추진 , 감리비 ( 38,300천원) )

붙임  1. 책임감리용역 배치 실정보고서 등 관련 서류.  끝.