문서번호	도시철도사업부-7789
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경전철1과장	도시철도사업부장
윤태권	박동룡	11/21 이은상
협 조	경전철2과장		이승우
	주무관		안규홍

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업 -

안전 및 공정 회의 결과 보고

2014. 11.

도시철도사업부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	우이신설경전철(주)	)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 우이-신설 도시철도 민간투자사업 -

2014.11월 안전 및 공정관리 회의결과 보고

우이-신설 도시철도 민간투자사업 2014.11월 안전 및 공정회의 결과를 보고드림

□ 개 요

○ 일  시 : 2014. 11. 18(화)11:00 ~12:00

○ 장  소 : 도시철도국 3층 회의실

○ 참석자

- 본 부 : 도시철도사업부장, 경전철1·2과장, 업무담당

- 사업시행자 : 우이신설경천철(주) 공사팀장, 건설사업단장

- 현 장 : 우이1~4공구 책임감리원, 현장소장

□ 추진공정 진도율

(기준일 : 2014.11.16.)

구 분		계 획(%)	실 적(%)	대 비(%)	비 고
전 체		53.34	53.58	100.44
우이1공구	전 체	62.42	62.32	99.95
	토 목	79.90	79.90	100.00
우이2공구	전 체	67.55	68.85	101.92
	토 목	80.12	81.70	101.97
우이3공구	전 체	53.48	54.23	101.40
	토 목	64.54	65.43	101.40
우이4공구	전 체	64.99	64.51	99.26
	토 목	77.52	76.95	99.26

□ 주요 공정보고 내용

○ 우이1공구 : 차량기지 가시설 해체 및 구조물 되메우기 추진(`14.12.20)

○ 우이2공구 : 본선4구간 토공완료(`14.11.30)를 목표로 추진

○ 우이3공구 : 본선1터널 삼양동사거리 사유지 하부통과 구간에서 강북경찰서 발파 불허로 지연되고 있으나 암파쇄 장비를 추가 투입하여 추진

○ 우이4공구 : L11정거장 협력업체 타절로 인하여 공정이 지연되고 있으나,

기존 협력업체 투입 및 야간작업 시행 중(11월말 협력업체 계약 예정)

□ 회의결과

○ 본부 전달 사항

- 동절기 공사장 화재 및 안전사고 예방에 철저를 기하고 2014.11.28일까지 점검결과 제출 바람

․ 소화기 위치 및 관리상태 점검, 화재발생 위험 안내간판 정비 등

․ 근로자 휴게실 정리정돈 및 화재발생 취약부 집중 점검 등

- 현장 순찰 및 점검 시 이상여부 발견되면 즉시 현장조치하고, 유관기관 협조 필요 시 본부 통보, 본부에서는 해당구청에 통보하여 협의 및 조치

- 안전관리와 시공의 기본사항에 충실

- 현장에서 발생한 주요 상황에 대해서는 신속한 보고체계가 이루어질 수 있도록 조치 바람

따로붙임 : 1. 공정회의 사진 1부.

2. 공정 회의 자료 각1부.  끝.