내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	양천자원회수시설 운영소장
(경유)
제목	양천자원회수시설 대정비 기간 변경 승인 통보

1. HS양천 제2014-727(2014.11.20.)호와 관련입니다.

2. 양천자원회수시설 대정비 기간 변경 요청에 대하여 아래와 같이 승인하오니 차질없이 업무를 추진하시기 바랍니다.

가. 정비일정 변경

구 분	당 초	변 경	비고
기간	2014.10.18 ～ 11.15	2014.10.18 ～ 12.02
폐기물반입중지	2014.10.11 ～ 11.12	2014.10.11. ～ 11.12. 2014.11.20. ～ 12.03	폐기물 재고량 3,109톤(11/19)
폐기물 반입시작	2014.11.13	2014.12.04
소각로 가동 시작	2014.11.16	2014.12.03

나. 변경사유 : DCS 점검 및 배관 보수공사 시행으로 일정 조정

다. 승인사항

- SH공사 수열공급중단 및 중온수 배관 공사 관련 긴밀한 업무 협조

- DCS 점검 및 시설보수 철저히 시행

- 공사시 안전에 최우선을 두며 품질 및 공정, 폐기물 관리 철저

- 조치완료 후 결과 보고.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박경리		자원회수시설팀장	代이상윤		자원순환과장	11/21 최홍식
협조자
시행	자원순환과-18060	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3683	/전송	02-2133-1026	/		/	대시민공개