문서번호	방재시설부-12039
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이병환		김흥근	11/21 임춘근
협조

「잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역(1차분 4회)」

준공기한연기 및 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역(1차분 4회)」

준공기한연기 및 설계변경 검토 보고

본 전면책임감리용역에서 수행중인 용허리빗물저류조설치공사의 준공기한  연기와 추가공정(토출관로 부설)처리 등에 따른  책임감리용역 준공기한 연기 및 설계변경사항 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 방재시설부-11858(`14.11.18) : 용허리공원빗물저류조설치공사 준공기한                                       연기검토 보고

○ 신명감-1082(`14.11.20) : 전면책임감리용역 변경계약(1차4회) 요청

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역

○ 용역규모 : 잠원2빗물펌프장 신설공사 및 용허리 빗물저류조 설치공사

○ 용역기간 : `13.04.01 ~ `15.12.31(1차분 `13.4.1~`14.11.30)

○ 용 역 비 : 금1,108,750천원(1차 : 817,300천원)

○ 용 역 사 : ㈜신명건설기술공사 외 2개사

□ 보고내용

○ 준공기한 연기 및 설계변경

- 책임감리용역 수행중인 용허리빗물저류조공사의 준공기한 연기 등 현장여건

변경에 따른 감리용역기간(1차분) 연기(`14.11.30⇨`14.12.31) 및 설계변경

- 변경내용

구 분		준공기한	계약금액(천원)	비 고
전체분		2013. 4. 1 ~ 2015. 12.31	1,108,750	변동없음
1차분(4회)	당 초	2013. 4. 1 ~ 2014. 11.30	817,300	증 27,500천원
	변 경	2013. 4. 1 ~ 2014. 12.31	844,800

○ 감리원 배치계획

- 총괄분 : 변동없음

- 1차분  :  책임 및 토목보조감리원 각 1개월 연장

○ 감리기간 연기 귀책소재

- 귀책소재 : 도시기반시설본부 방재시설부(지체상금 : 미부과)

□ 조치의견

○ 용허리빗물저류조설치공사 준공기한 연기에 따른 감리기간 연기와 설계변경 사항이 타당함으로 계약부서에 변경의뢰코자함.(`14.11.30⇨`14.12.31)

붙임  1. 감리단 공문 1부.

2. 설계변경 내역서(1차분) 1부.  끝.