문서번호	시설보수과-9349
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		代류춘광	11/21 조병준
협조

추가작업 계획보고

〈배수홈통설치외 1건〉

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

강서도로사업소

(시설보수과)

추가작업 계획보고

『여의2교 보수공사』시행중 당초 설계에는 없으나 시설물 유지관리상 보수가 요구되는 사항으로 추가 작업계획을 수립하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사현황

공 사 명 : 여의2교 보수공사

공사기간 : 2014. 5.12 ~ 2015. 1. 6

공사개요 : 받침장치 보수 31개소, 바닥판 연결2개소

콘크리트 균열보수 608m 외

도 급 액 : 583,504천원

도 급 자 : 거현산업(주)  박기옥

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		추가 작업사항

【배수홈통설치】

현  황

○ S2, S3, S4 배수홈통 부재로 인하여 슬래브 바닥판 하면으로 우수가 유입되어 콘크리트 열화 및 노상으로 우수가 떨어져 주민 불편

관련도면

현황사진

S2 바닥판하면 (P1측 1개소)	S3 바닥판하면 (P3측 2개소)	S4 바닥판하면 (P3측 2개소, P4측 2개소)

개략공사금액

○ 규    격 : 스테인리스 강관, 150A(3T)

○ 공 사 비 : 223,000원 ×180m =40,140천원

【교량 상부 보차도경계 연석콘크리트】

현  황

○ 양방향 P1~P3 구간의 보차도 경계 연석콘크리트부에 동절기 제설작업시 염화칼슘 살포 등으로 단면손상 및 도시미관 저해

관련도면

현황사진

여의도 방향(P1~P3)	영등포 방향(P1~P3)

개략공사금액

○ 규    격 : T=30mm(철근방청)

○ 공 사 비 : 150,053원 ×97㎡ =14,550천원

검토의견

○ 위 사항을 시설관리공단에 통보하여 추가작업토록 하고 향후 실측물량에 의거 추후 설계변경 조치코자 함.  끝.