문서번호	문화정책과-14371
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	문화관리팀장	문화정책과장	문화체육정책관		문화관광디자인본부장
이영규	이철형	정헌재	양현미		11/21 이창학
협 조

『대전차방호시설』예술창작공간 조성

2014. 11.

문화관광디자인본부

(문화정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방재정법, 건설기술관리법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	종로구청	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『대전차방호시설』예술창작공간 조성 계획

서울창포원주변 노후된 대전차방호시설을 예술창작공간으로 조성하여

동북권지역의 문화예술균형발전과 시민문화 향유기회 제공을 통해 지역

주민의 다양한 문화예술 수요에 기여코자 함

□  사업목적

❍  서울창포원북측의 노후된 대전차방호시설과 주변의 환경정비 및       예술인 작업공간으로 활용을 위한 창작공간 조성

(‘13.9.2 도봉구 현장운영시장실 운영시 도봉구 건의)

□  사업개요

❍  위    치 : 도봉구 도봉동 6-5 일대

❍  규    모 : 부지규모 8,728㎡, 지상1층 5개동(연면적 2,155㎡)

❍  사업기간 : 2015.1 ~ 2016.12.

❍  총 사업비: 2,650백만원

(단위:백만원)

구분	계	2015년	2016년	비고
계	2,650	500	2,150
설 계 비	122	122
시 설 비	2,330	350	1,980
감 리 비	28	28
시설부대비	170	0	170

□ 그간 추진경위

❍ ‘13.09.12 : 도봉구 현장시장실

-  서울창포원주변 대전차방호시설 환경개선 제안

❍ ‘14.03.05 : 건축구조 전문가 자문실시

-  시설물 대부분에 균열이 있어 보강 보다는 철거 후 재시공 필요

❍ ’14. 9. 3  : 문화관광디자인본부장, 도봉구청장 간담회 개최

- 분단시대의 상징물로서 보존가치가 있으니, 예술인 창작공간 조성사업

으로 재검토 요청

❍ ’14. 9. 22 : 행정1부시장, 도봉구청장 간담회 개최

- 지역 문화 창작시설로 리모델링하여 근현대 유산이 역사적으로 보존

되고 지역 문화 활성화에 기여 할 수 있도록 요청함

□ 향후 추진계획

❍ ‘15.1~4월  : 대전차방호시설 예술창작공간 조성 설계용역

❍ ‘15.5~12월 : 시공자 선정 및 공사 착공

❍ ‘16.1~12월 : 대전차 방호시설 예술창작공간 조성 완료

붙임 : 사업부지 현황(위치도, 현장사진) 1부.  끝.