문서번호	교통운영과-22064
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
구영수		고광섭	11/24 강진동
협조
	주무관		박우동

교통신호제어용 차량검지기 보수공사(연간단가계약)

물량 변동에 따른 예산사용 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

교통운영과

교통신호제어용 차량검지기 보수공사(연간단가계약)

물량 변동에 따른 예산사용 계획 보고

교통신호제어용 차량검지기 보수공사(본공사2차) 시행 중 물량변동에 따른 예산 사용 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 교통신호제어용 차량검지기 보수공사(연간단가)

○ 계 약 자 : ㈜파워일렉 이 정 림

○ 공사기간 : 2014. 10. 18.~2014. 11. 20.

○ 계약금액 : 금143,204,350원

○ 예산과목 : 교통신호제어용차량검지기보수, 시설비(401-01)

□ 관련근거

○ 2014년 교통신호제어용 차량검지기 보수공사(본공사1차)시행지시[교통운영과-13680(2014.7.22.)호]

○ 본공사1차 현장 실정보고서 제출(주)파워일렉[문서접수:교통운영과-15002(2014.8.12.)호]

○ 교통신호제어용 차량검지기 보수공사(연간단가)본공사1차 현장검사 결과보고[교통운영과-15571(2014.8.20.)

○ 2014년 교통신호제어용 차량검지기 보수공사(본공사2차)시행지시[교통운영과-19802(2014.10.23.)호]

○ 본공사2차 현장 실정보고서 제출(주)파워일렉[문서접수:교통운영과-21540(2014.11.17.)호]

□ 변경내역

○ 본공사 1차 앞막힘제어 검지기(국방부교차로 등 4개소) 와 본공사2차 앞막힘제어 검지기(디지털단지오거리 등 10개소) 및 좌회전감응 제어 검지기(목동운동장 등 5개소) 확대를 위한 교통신호제어용 차량검지기 신설 및 보수공사 물량 변동

○ 주요 시공물량 변경

구 분 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증감
8각헤드 설치/야간	1.8×1.8/ 혼합	개	50	57	7
리드인설치/야간	h=12cm/혼합	m	200	500	300
측구리드인 배관	FC Φ50mm	개소	100	27	-73
휘더선/루프선접속		조	100	55	-45
휘더2선 신설	F-CVV-S, 2C, 1.5㎟	m	200	304	104
휘더2선 컷팅설치/야간	h=12cm/혼합	m	300	2,588	2,288

□ 본공사 세부내역

구 분	차 수	금 액(원)	비 고
본 공사	1차(완료)	41,056,400	※ 계약금액 대비 6,015,050원 증
	2차(진행중)	108,163,000
	합 계	149,219,400

□ 예산계획

○ 교통신호제어용 차량검지기 잔여예산 활용

○ 사용할 금액 : 금6,015,050원

구 분	예산액(원) (A)	계약금액(원) (B)	사용가능액(원) (C=A-B)
총 액	162,450,000	143,204,350	19,245,650

□ 향후일정

○ 2014. 11.  계약금액 변경의뢰(재무과)

붙임 :  1. 계약금액 변경내역서 1부

2. 본공사1차 당초, 변경도면 및  물량변경 상세 사유서 1부

3. 본공사2차 당초, 변경도면 및  물량변경 상세 사유서 1부.  끝.