문서번호	물재생과-6487
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김도형		강병수	11/24 채희정
협조	관리과장		김홍덕
	슬러지재활용과장		이동신

3,4처리장 고도처리시설물 인수 인계 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11.

중랑물재생센터

(물재생과)

3,4처리장 고도처리시설물 인수․인계 보고

제3,4처리장 고도처리 개량공사가 완료되고 종합시운전 결과 보증수질을 충족함에 따라 고도처리시설물에 대한 인수․인계를 시행하고자 함

공사 현황

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화(고도처리)

○ 위    치 : 서울시 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

○ 사업기간 : 2009. 2. 13 ～ 2013. 12. 30(시운전 2013.11.01.～2014.02.28.)

○ 사 업 비 : 57,160,890,400원

○ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 도 급 자 : 지에스건설(주), ㈜한라산업개발, 동아건설(주), ㈜삼진일렉스

○ 연대보증 : 롯데건설(주)

○ 감 리 자 : ㈜한국종합기술, ㈜제일엔지니어링

○ 하자담보책임기간 : 공종별 하자담보책임기간으로 함

○ 공사내역 : 고도처리시설 88만톤/일(4처리장 표준활성슬러지 10만톤/일 존치포함)

- 고도처리공정 도입 : MLE공정(무산소조, 호기조), 3처리장 78만톤/일

- 여과시설 신설 및 반류수 처리시설, 약품투입시설(우선 시공분)

- 기계 및 전기설비 : 1식

- 건축 및 건축설비 : 1식

- 토목 및 조경 : 1식

고도처리 공사 진행 상황

○ 2009. 2. 13 : 고도처리공사 착공

○ 2011. 8. 22 : 우선시공분(반류수처리시설, 약품투입시설, 여과기시설) 인수

○ 2012. 12. 31 : 고도처리공사 완료

○ 2013. 11. 01 ～ 2014. 02. 28 : 종합시운전 실시(보증수질 충족)

○ 2014. 09. 30 : 고도처리시설물 인수․인계 요청(도기본 방재시설부-9535)

○ 2014. 10. 24 : 고도처리시설물 인수 전 자체점검 시행

○ 2014. 11. 06 : 합동회의 개최(운영부서, 도기본, 감리단, 시행사)

○ 2014. 11. 18 : 보완요구 요청 공문 시행(도기본, 감리단, 시행사)

○ 2014. 11. 20 : 보완요구 요청 회신 공문(도기본)

인수․인계 시설 현황

○ 붙임문서 “인수․인계시설 세부 목록” 참조

조치계획

○ 2014. 11. 19 : 공사 준공도서 및 예비품, 인수 완료함

○ 검토 의견

- 고도처리시설물 공사 완료 후 시운전 결과 보증수질을 충족하였고         현재까지 정상운영 중이며

- 세목․미세목 스크린 제작업체 부도로 인한 하자처리 보수업체 변경 건은

시공사측에서 제출한 보완 계획에 따라 추진 중에 있으므로(12.15 완료예정)

- 인수 ․ 인계를 시행함이 가(可)한 것으로 사료됨

○ 인계 기관 : 도시기반시설본부

○ 인수 기관 : 중랑물재생센터

○ 인계․인수 일자 : 2014. 11. 24

붙임 : 1. 3,4처리장 고도처리시설 인수 전 합동회의 결과 보고 1부.

2. 고도처리시설물 인수 전 협조요청 공문 1부.

3. 고도처리시설물 인수 전 협조사항 회신 공문 1부.

4. 고도처리시설물 인수․인계 전 보완계획(GS건설) 1부,

5. 인수․인계시설 세부 목록 1부.

6. 시설공사 인수․인계서 1부.   끝.