투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행에 따른 재계약 의뢰(2014년 포장도로 노면표시 도색공사)

1. 도로보수과-6772호(2014.11.19.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 사업소에서 시행중인 「2014년 포장도로 노면표시 도색공사-동부」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 재계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 포장도로 노면표시 도색공사-동부

나. 도 급 자 : ㈜미화 대표 유호석

다. 공사기간 : 2014. 05. 22. ~ 2014. 12. 31.

라. 설계변경 내역                                      (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증 ․ 감	비 고
총공사비	557,539,749	575,171,730	17,631,981	증
도 급 비	307,944,319	320,000,000	12,055,681	증
관 급 비	245,595,430	252,608,180	7,012,750	증
이 설 비	4,000,000	2,563,550	-1,436,450	감

마. 변경사유 : ‘노후포장도로 정비공사’의 포장 시공물량 증가에 따른 차선도색 물량 증가 반영

바. 예산과목 : [도시개발] 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙  임 : 1. 설계변경(1회) 시행 1부.

2. 설계변경(1회) 사유서 1부.

3. 설계변경(1회) 검토 보고 1부.

4. 설계변경내역서(1회) 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이문희		주무관	박일연		도로보수과장	11/24 손수희
협조자
시행	도로보수과-6837	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지) 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0342	/전송	02-2040-0307	/	twodoor@seoul.go.kr	/	대시민공개