문서번호	설비부-13152
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박태욱	이달영	11/24 박기형

「경의선 숲길 공원조성 전기․통신공사 」

공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기 검토보고

2014. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「경의선 숲길 공원조성 전기․통신공사 」

공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행 중인「경의선 숲길 공원조성 전기․통신공사」와 관련책임감리원으로부터 선행공정(토목․조경) 지연에 따른 전기․통신공사 준공 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기 요청에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2014-872(2014.11.21.)호 『전기․통신공사 공사기한                및 관급자재 납품기한 연기 승인 요청』

Ⅰ		공사개요

구 분	전기분야	통신분야
공 사 명	경의선 숲길 공원조성 전기공사	경의선 숲길 공원조성 통신공사
공사위치	용산문화체육센터~마포구 가좌역(홍제천)
공사규모	L(연장)=3.48km, A(면적)=84,268㎡ 공원등(LED) 256등, CCTV카메라 27대, 스피커 69개
공사기간	2013.9.30.~2014.11.30. (전체 : 2013.9.30. ～ 2016.3.31.)
도 급 비	총차 : 598,374천원(1차 250백만원)	총차 : 270,000천원(1차 100백만원)
시 공 사	㈜현대전기외 1개사	㈜다우텔레콤
감 리 사	㈜유신외 1개사

Ⅱ		검토내용

연기사유

❍  선행공정(토목․조경) 지연에 따라 후속공정인 전기․통신공사의

시공여건이 조성되지 않아 공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기

연기현황

❍  공사 준공기한 변경

구 분	계 약 자	준공기한(1차)		계약금액 (변경없슴)	비 고
		당 초	변 경
경의선 숲길 공원조성 전기공사(1차)	대광기업외 1개사 (이 규현외1명)	2013.09.30.~ 2014.11.30	2013.09.30.~ 2015.01.10	250백만원	※ 총 차 : 변동없음
경의선 숲길 공원조성 통신공사(1차)	㈜다우텔레콤 (이 영순)	2013.09.30.~ 2014.11.30	2013.09.30.~ 2015.01.10	100백만원	※ 총 차 : 변동없음

❍  관급자재 납품기한 변경

(단위:천원)

건 명	규 격	수량	계약금액	계약자	납품기한		비고
					변경전	변경후
가로등주외 3종 구매	가로등주(1등)외1	99본	50,737	㈜명도산업	‘14.12.30	‘15.01.10	MDSP12-73본 MDSP20-26본
	LED등기구(40w)	102개	58,140	㈜다노테크	‘14.12.30	‘15.01.10
등기구(LED40w)외 9종 구매	가로등주(1등)외1	56본	33,772	㈜명도산업	‘14.11.30	‘15.01.10	1등-2본 2등-54본
	분전반(16회로)외4	6면	30,762	대신파워텍	‘14.11.30	‘15.01.10
	기초(300*300)	98개	9,800	㈜비앤비	‘14.11.30	‘15.01.10
	LED등기구(56w)외1	107개	63,230	㈜다노테크	‘14.11.30	‘15.01.10	56w-32 40w-75
콘크리트 기초구매	500*500	34개	7,820	㈜현암	‘14.11.30	‘15.01.10
	300*300	191개	19,100	㈜비앤비	‘14.11.30	‘15.01.10
분전반 구매	분전반(8회로)외1	3면	12,436	대신파워텍	‘14.11.30	‘15.01.10	8회로-2 6회로-1
경관조명기기 구매	35w	191개	99,320	㈜중일전기	‘14.12.04	‘15.01.10
CCTV설비 구매설치	영상감시장치	1식	162,496	㈜서광시스템	‘14.12.03	‘15.01.10
방송설비 구매설치	구내방송장치	1식	54,000	㈜합동전자	‘14.11.30	‘15.01.10

※ 관급자재 세부품목별 납품요구현황 : 별첨

❍  귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

❍  지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조치의견

❍  선행(토목,조경)공정 진행상황에 맞추어 전기․통신공사 준공기한 및 관급자재 납품기한을 연기하여 공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 책임감리원 검토보고서 1부.

2. 관급자재 세부품목별 납품요구현황 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.