문서번호	설비부-13131
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박태욱	이달영	11/24 박기형

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기 검토보고

2014. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행 중인「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」와 관련 책임감리원으로부터 선행공정(토목) 지연에 따른 전기공사 준공기한  및 관급자재 납품기한 연기 요청에 대한 검토 보고임.

관련근거

❍ 남부감 제14-328(2014.11.21.)호 「전기공사 준공기한 및 관급자재 납품 연기 요청」

공사개요

❍ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사

❍ 위     치  : 구로구 개봉동 198-1번지 남부순환로(개봉역앞)

❍ 규     모  : L = 2,280m (지하차도 736m, 4차선)

수전설비 450kw, 가로등 113등, 지하차도등 903등

❍ 공사기간 : 2009. 08. 03 ~ 2015. 01. 30

❍ 공사금액 : ￦2,011백만원(도급 1,044백만, 관급 903백만, 이전비 64백만)

❍ 시  공  사 :(주)정안전기외 1개사

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

검토내용

❍ 연기사유

- 선행공정인 토목공사 지연(한전 지중화 공사후 토목공종인 보도블럭 공사시행)

❍ 연기현황

- 공사 준공기한 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
총차공사	2009.08.03~ 2015.01.31	2009.08.03 ~ 2015.07.31	토목공정 지연
4차공사	2013.08.16 ~ 2015.01.31	2013.08.16 ~ 2015.07.31

※ 선행공종(토목) 공사기간 : (당초) 2007.09.10.~ 2014.12.31.→(변경) 2007.09.10 ~ 2015.06.30

- 관급자재 납품기한 변경

(단위:천원)

건 명	구 분	수량	계약금액	계약자	납품기한		비고
					변경전	변경후
가로등주외 17종 구매	가로등 암대	88개	26,560	에이컴조명(주)	‘14.11.30	‘15.7.30	1등용-72 2등용-16
	가로등기구	96개	31,680
	보행등기구 암대	19개	3,230
	LED보행등	19개	7,315	세미라이팅
	터널등기구	2개	280	강산조명
	램프(150W)	2개	118
	램프(250W)	40개	2,480
	램프(350W)	56개	5,096
	안정기(150W)	2개	106
	안정기(250W)	40개	2,200
	안정기(350W)	56개	3,136
	베이스카바	99개	5,445
	가로등 자동점멸기	5개	19,995	거명하이텍			분전반 감시기
							회로감지기
		20개	5,980
가로등주 2종 구매	가로등주-9.3m	8개	3,520	에이컴조명(주)
	가로등주-6..3m	9개	2,880

※ 세부품목별 납품요구현황 : 별첨

- 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

❍ 선행(토목)공정 진행상황에 맞추어 전기공사 준공기한 및 관급자재        납품기한을 연기하여 공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 책임감리원 검토보고서 1부.

2. 관급자재 세부품목별 납품요구현황 1부. 끝.