문서번호	조경과-5049
결재일자	2013.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		조경과장	관리부장		서울대공원장
김기배		이성주	양현모		09/16 안영노
협 조
	주무관			홍성실

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 : (김기배,홍성실주무관 / 이성주과장)

- 실행계획자 : (김기배,홍성실주무관 / 이성주과장)

(최종태주무관)

- 실행자:(홍성실,김기배,최종태)

『유아 및 어린이들이 행복한 공간』

관사 주변 어린이놀이터 조성완료 보고

2013.  9.

서울대공원

(조 경 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『유아 및 어린이들이 행복한 공간』

관사 주변 어린이놀이터 조성완료 보고

관사 주변에 소규모 놀이공간을 조성 및 주변환경 정비로 유아 및 어린이들의 안전사고 예방과 관사거주 직원들의 복리증진을 위한 어린이놀이터 조성을 완료하고 보고 드림.

Ⅰ				추 진 개 요

❍ 기    간 : 2013. 7. 11 ~ 9. 10.

❍ 대 상 지 : 기존 모래씨름장(관사 1동과 2동사이 녹지대)

❍ 면    적 : 150㎡

❍ 조성내용 : 조합놀이대 1조, 그네 1조, 야외탁자 2조, 모래포설, 주변정비 등

❍ 소요예산 : 18,000천원

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도향상, 산림내이용시설 및 조경관리강화, 꽃동산조성 및 녹지조경시설물 유지관리, 재료비

Ⅱ				추 진 방 향

❍ 관사 거주자 및 관심직원 설문조사 후 결과 놀이터 위치 및 시설종류 선정

❍ 유아 및 어린이들의 놀이공간 확보와 관사 거주자들을 위한 쉼터 제공

❍ 놀이터 바닥면 모래포설, 수목전지 등 주변환경 일제정비

❍ 놀이시설, 모래 등 재료는 구매 확보, 자체인력 및 장비활용 직영 설치

Ⅲ				추 진 경 과

❍ 2013. 7. 11          : 확대간부회의시 현황 및 개선방안 보고

❍ 2013. 7. 16 ~ 22     : 놀이터 조성 관련 설문조사

❍ 2013. 7. 23          : 관사 거주자 주민설명회

❍ 2013. 7. 29          : 조성계획 방침 수립(조경과-4125)

❍ 2013. 8.  5 ~ 8. 19  : 시 예산담당관 예산배정 협의

❍ 2013. 8. 22 ~ 8. 30  : 재료구매, 기반조성 및 시설물 설치, 주변환경 정비

❍ 2013. 9.  5         : 놀이터 설치검사 실시(한국건설생활환경시험연구원)

❍ 2013. 9.  9 ~ 9. 10  : 진입로 보도블록 설치 및 주변정비

❍ 2013. 9. 10         : 어린이놀이터 준공행사 및 개장

Ⅲ				향후 추진일정

❍ 2013. 10 ~ 11월 : 도로 경계부 울타리 설치, 놀이터 주변 휴게시설 설치

- 사생활 보호를 위한 대나무 울타리 설치, 향나무 등 원내 기존수목 이식

- 보호자 휴식공간 제공을 위한 목재데크 및 테이블 설치

❍ 안전한 환경 관리를 위하여 모래회충 검사 등 지속적인 유지관리 실시

Ⅳ				기 대 효 과

❍ 유아 및 어린이들의 안전한 유희·운동공간 제공으로 체력 및 상상력 증진

❍ 직원 복리증진 및 만족도 향상과 관사 주변 환경정비로 쾌적한 환경 제공

붙임 : 현황사진 1부.  끝.