문서번호	기전설비과-7943
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
서기종	서대훈	11/24 박용철

암사정수장 현대화 및 고도처리건설 전기공사

설계변경(총차 및 4차)검토보고

2014. 11.

상수도 사업본부

(생산부 기전설비과)

작 성 자	생산부장 : 박용철 ☎3146-1301 기전설비과장 : 서대훈☎1330 담당 : 서기종 ☎1337

암사정수장 현대화 및 고도처리건설 전기공사

설계변경(총차 및 4차)검토보고

감리단으로부터 『암사정수장 현대화 및 고도처리건설』 4차분 준공에 따른 설계변경 및 총차 설계변경 사항에 대한 검토결과를 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공사개요

공 사 명	공사개요	공사기간	도급비	도급자	감리자
암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 전기공사	수변전설비 1식 전력설비 1식 기타 1식	2009. 11. 09 ~2014. 11. 25	6,068,657천원	육일전력(주) 박 봉 기	범한ENG

Ⅱ		설계변경 관련근거 및 사유

관련근거

암사정수장 설계변경 내역서 제출(전기)

- 범한 796호(2014.11.21)

설계변경 사유

실정보고 승인 건 계약금액 조정 심의 결과 반영

총차분 및 4차분 준공에 따른 제 경비 정산

간접노무비 반영

공사비 변경금액

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 차	6,068,657,000	5,793,947,000	감) 274,710,000
4차	1,329,434,000	1,054,724,000	감) 274,710,000	간접비 포함 증157,065,000

Ⅲ		설계변경 사유별 세부 변경내용

1		실정보고 관련 계약금액 변경내역

제 목	증감 (천원)	변경내용 및 근거
ｏ 방호울타리 진동감지기 설치	증 142,962	• 고도처리구간 외곽울타리 진동감지기 설치 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7172호(13.12.11) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 활성탄흡착지 추가조명 설치	증 31,275	• 활성탄흡착지 지내조명 추가설치요구 반영 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7172호(13.12.11) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 계측제어케이블 추가 공사	증 36,549	• 밸브 및 모타용 누락계측제어케이블 반영 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-5008호(14.07.24) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 밸브동력, 계측, 전등, 전열설비 추가 공사	증 56,390	• 본관동 정수지앞 밸브 및 접합정밸브의 동력설비 추가공사 반영 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-5008호(14.07.24) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 본관동 가로등 이설 공사	증 9,232	• 본관동 가로등 이설 추가 반영 및 예비배관 포설 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-5008호(14.07.24) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 본관동 조경용 조명등 설치	증 16,023	• 본관동 조경공사지역 내 조경용 조명등 설치 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-5008호(14.07.24) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 송수관로 전기방식 전원 인입공사	증 14,194	• 토목공사에서 시행한 송수관로 방식구간에 대한 전원인입공사 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-5008호(14.07.24) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)

제 목	증감 (천원)	변경내용 및 근거
ｏ 임시동력공사 공종 삭제	감 -729,473	• 본공사와 관련없는 미 시공 공종 삭제 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-5008호(14.07.24) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 고도처리구간 조명등 개량 및 추가설치	증 43,407	• 고도처리구간 내 일부 조도부족구간 해소 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ 방호외곽등 전원케이블 용량 변경	감 -13,717	• 방호외곽등 용량변경에 따른 케이블 규격 감소 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ 오존접촉지 조명등 이설	증 8,951	• 오존접촉조 조명등 위치이설 및 밸브실 조명등 추가 설치 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ 케이블트레이 커버 설치	증 9,699	• 케이블트레이 커버 미 반영구간에 대한 케이블트레이 커버 추가 설치 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ 제2정수장 유입밸브용 전원 및 계측케이블 포설	증 15,507	• 제2정수장 유입밸브 설치에 따른 전원 및 계측케이블 설치 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ 샘플링펌프 전원 연결	증 11,578	• 추가설치된 샘플링펌프에 대한 전원공급 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ 분배조밸브 전원방식 변경	증 12,971	• 분배조밸브 상시전원에서 비상전력으로 추가 시공 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)

제 목	증감 (천원)	변경내용 및 근거
ｏ 후렉시블 배관 추가설치	증 14,422	• 각 현장 밸브 및 모타전원공급부 후렉시블 배관 미 반영분 반영 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ 배수펌프 설치공사	증 15,507	• 배수펌프 추가설치 개소 전원 공급 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-6020호(14.09.05) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 활성탄흡착지 배관 시공방법 개선 절감	감 -110,271	• 강관배관을 케이블트레이 및 후렉시블배관 시공으로 변경 감액 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ 송수펌프장 등 건축전기공사 정산	감 -14,350	• 분배조밸브 상시전원에서 비상전력으로 추가 시공 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
ｏ cctv 위치변경공사	증 30,349	• 운영센타요구에 의거 cctv 위치변경 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-6249호(14.09.18 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.08.25)
ｏ 방송스피커 선로 추가	증 4,316	• 분배조앞~서문울타리 구간 방송스피커 이설공사 누락 반영 • 관련근거 실정보고 승인:기전설비과-7240호(14.10.22) 계약심의 통보:기전설비과-5688호(14.10.28)
계(순공사비)	감 -394,479
ｏ 간접비추가 (제경비, 부가세 포함)	증 157,065	• 관련근거 간접비 승인:기전설비과-7904호(14.11.20)

가. 전체분에 대한 실정보고 반영 변경내용

구 분	당초 금액	변경 금액	증, 감	비 고
재료비	1,863,098,129	1,749,951,403	감 113,146,726
노무비	2,087,339,356	1,981,098,035	감 106,241,321
경비	627,424,847	556,351,679	감 71,073,168
순공사원가	4,577,862,332	4,287,401,117	감 290,461,215
제잡비	995,821,995	932,001,111	감 63,820,884
esc 반영	494,972,673	417,479,772	감 77,492,901
간접비	0	157,065,000	증 157,065,000
계	6,068,657,000	5,793,947,000	감 274,710,000

나. 4차분에 대한 실정보고 및 계약금액 조정 승인 반영 변경내용

구 분	당초 금액	변경 금액	증, 감	비 고
재료비	379,310,125	266,163,399	감 113,146,726
노무비	430,762,703	324,521,383	감 106,241,320
경비	132,305,743	61,232,575	감 71,073,168
순공사원가	942,378,571	651,917,357	감 290,461,214
제잡비	371,916,278	141,705,878	감 230,210,400
esc 반영	181,499,199	104,035,765	감 77,463,434
계	1,329,434,000	897,659,000	감 431,775,000
간접비		157,065,000	증 157,065,000
합계	1,329,434,000	1,054,724,000	감 274,710,000

2		물가변동(E/S)관련 계약금액 변경내역

가. 물가변동 계약금액 조정(E/S) 요청 및 승인 내용

구 분	물가변동 조정 적용금액	요청일	승인일	근 거
1회	증157,865,000원	2011. 04. 29	2011. 05. 16	기전설비과-1627
2회	증172,396,000원	2011. 06. 03	2011. 06. 13	기전설비과-2018
3회	증160,175,000원	2012. 11. 08	2012. 11. 28	기전설비과-6428
4회	증135,396,000원	2013. 10. 31	2013. 11, 07	기전설비과-6395

나. 물가변동 계약금액 조정(E/S) 반영 내용

1) 전체분

E/S 회차별	E/S 조정 대상금액	지수율	회차별 E/S금액	계약대상금액	E/S 반영금액
1회	3,670,402,228	3.36%	122,325,515	5,219,402,228	5,341,727,743
2회	3,792,727,743	3.55%	133,641,834	5,341,727,743	5,475,369,577
3회	2,776,369,577	4.15%	114,653,421	5,475,369,577	5,590,022,998
4회	1,272,776,532	3.68%	46,859,002	5,590,022,998	5,636,882,000

2) 4차분

E/S 회차별	E/S 조정 대상금액	회차별 E/S금액	E/S 반영금액	지수율
1회	793,623,235	26,665,744	820,288,979	3.36%
2회	820,288,975	29,120,258	849,409,233	3.55%
3회	849,409,233	35,250,483	884,659,716	4.15%
4회	353,241,425	12,999,284	897,659,000	3.68%

3		보험료 등 제경비 정산

(상단:당초)/(하단:변경)

항목	총차분	변경(실비정산)					증, 감 (4차분)
		1차분	2차분	3차분	4차분	계
산재 보험료	70,969,535	19,850,694	13,198,134	23,274,776	14,645,931	70,969,535	감 3,612,201
	67,357,333	19,850,694	13,198,134	23,274,776	11,033,729	67,357,333
고용 보험료	14,402,640	4,028,523	2,678,445	472,3410	2,972,262	14,402,640	감 733,064
	13,669,576	4,028,523	2,678,445	472,3410	2,239,198	13,669,576
국민건강 보험료	35,095,077	9,394,671	6,246,236	11,015,190	8,438,980	35,095,077	-
	35,095,077	9,394,671	6,246,236	11,015,190	8,438,980	35,095,077
노인장기 요양보험료	1,677,544	449,065	298,570	526,526	403,383	1,677,544	-
	1,677,544	449,065	298,570	526,526	403,383	1,677,544
국민연금 보험료	57,235,597	15,321,510	10,186,815	14,431,280	17,295,992	57,235,597	감 23,568,537
	33,667,060	15,321,510	10186815	14,431,280	-6,272,545	33,667,060
퇴직공제 부금비	42,788,595	11,968,280	7,957,353	14,032,711	8,830,251	42,788,595	감 24,018,795
	18,769,790	11,968,280	7,957,353	14,032,711	-15,188,554	18,769,790

Ⅴ		감리원 검토의견

실정보고 및 계약심의요청 승인내용이 반영되었고 제 경비 정산을       위한 제 보험료 납입현황 증빙서 확인결과 적정하여 설계변경 처리함이 타당.

Ⅵ		조치계획

실정보고에 대해 기 승인한 사항으로 계약금액조정 심의결과와 제경비 정산 및 공기연장에 따른 간접비를 반영, 설계변경 시행코자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경 감리검토서 1부.

2. 설계변경 내역서(4차) 및 총차내역서 1부.

3. 공사기간연장에 따른 간접비 조정신청 검토보고서 1부. 끝.