투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청

우리부에서 시행중인 『강변북로(성산~반포) 확장공사 교통영향분석·개선대책 수립용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역현황

◦ 용 역 명 : 강변북로(성산~반포) 확장공사 교통영향분석·개선대책 수립용역

◦ 규    모

- 강변북로(성산대교~반포대교) 확장 및 구조개선 (L=11.6km)

1) 기타 구간 (2011년 2월 기본설계 완료)

∙ 강변북로 확장(성산대교~양화대교) : 도로확장 폭 8차로→10차로(L=1.8km), 성산대교 북단 램프구조 개선(L=0.7km)

∙ 강변북로 구조개선(한강대교~반포대교) : 동작대교 및 반포대교 북단 연결로 개선(L=3.0km)

2) 턴키구간 (2012년 2월 턴키 실시설계 중지)

∙ 하저터널 건설(양화대교~원효대교) : 폭 4차로(L=4.9km)

3) 지하화 구간 (2012년 2월 기본설계 완료)

∙ 용산국제업무지구 구간 지하화(원효대교~한강대교) : 기존 강변북로 지하화 폭 8차로(L=1.9km), 지역간 연결도로 신설 : 폭 4차로(L=2.1km)

◦ 용역기간 : ′10. 8.20. ~ ′14.11.30.

◦ 도 급 비 : 166백만원

◦ 용 역 사 : 극동엔지니어링(주)

나. 준공기한 연기

◦ 당    초 : ′10. 8.20. ～ ′14.11.30.

◦ 변    경 : ′10. 8.20. ～ ′15. 6.30.

◦ 지체상금 : 미부과

◦ 귀책부서 : 도시기반시설본부

다. 연기사유

◦ 당초 용산국제업무지구계획 미확정 및 강변북로(성산~반포) 확장 사업계획 확정시까지 교통영향분석·개선대책용역를 중지하라는 주관부서의 조치계획에 따라 준공기한을 연기하고 과업을 중지하여 왔으며

◦ 용산국제업무지구계획 구역 지정이 해제되었으나 이에 따른 강변북로(성산~반포) 확장 사업의 주관부서 향후 조치계획이 수립되지 않아 과업을 재개하기 어려워 준공기한을 연기하고자 함.

붙임 : 1) 준공기한 연기 보고서 1부.

2) 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

3) 강변북로 확장공사 교통영향분석·개선대책용역 계약서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	조성만		토목부장	11/24 노우성
협조자
시행	토목부-23111	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2591	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	대시민공개