문서번호	소방행정과-14065
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
박수억	김묘진	김종한		11/24 황인환
협 조

쌍문119안전센터 건축공사 설계변경 계획

- 현장 여건 변동 및 설계제외 등 기능강화를 위한 -

도 봉 소 방 서

(소방행정과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	지방자치단체를상대로하는 계약에관한법률	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

쌍문119안전센터 건축공사 설계변경 계획

- 현장 여건 변동 및 설계제외 등 기능강화를 위한 -

쌍문119안전센터 신설 건축분야 공사중 설계 미반영 사항 추가 등에 대한 설계변경 실정보고에 대하여 다음과 같이 검토 후 변경하고자 함.

□ 공사개요

□ 공사명 : 쌍문119안전센터 건축공사

□ 사업대상

부 서 명	위 치	건 물 개 요			준공년월일	비 고
		층수	연면적(㎡)	대지면적(㎡)
쌍문119안전센터	도봉구 노해로 152	3/1	799.4	606.00	2014. 11. 27.

□ 사업기간 : 2014. 06. 01. ~ 2014. 11. 27.

□ 시 공 자 : ㈜중앙건설 대표자 이만종(양천구 신월로 119)

□ 도 급 비 : 992,993,000원

□ 공사개요 : 쌍문119안전센터 신축 건축공사

□ 설계변경 내역

□ 설계변경 세부내역

공 종	변경사유	변경전	변경후	증감
계		992,993,000	1,018,204,000	25,211,000
건 축	석공사, 타일공사, 방수공사, 지붕 및 홈통공사, 옥상·지하 사다리 설치, 미장공사, 방화문 및 자동문설치, 유리공사, 도장공사, 기타공사	759,779,583	774,814,778	15,035,195
토 목	흙막이공사, H-PILE+토류판 공사, 버팀대설치공사, 주요자재비, 계측기설치 및 관리, 관급자재비 – 일부 계산 제외	128,375,672	125,349,580	-3,026,092
기계설비	장비설치공사, 환기닥트공사, 난방배관공사, 위생배관공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 우수배관공사	104,837,745	118,039,642	13,201,897

□ 계약금액 변경

변경전 계약금액	증감내역	변경후 계약금액	단가산출기준
992,993,000원	증25,211,000원	1,018,204,000원	계약내역 단가 및 요율 적용 (낙찰율 적용)

□ 검토 및 처리의견

□ 건축 공사

- 건축공사 설계 미반영 및 설계변경에 따라 석공사 및 수장공사 등 변경

□ 토목 공사

- 흙막이 및 버팀대설치 등 변경

□ 기계설비 공사

- 난방 배관 추가로 인한 규격 변경 등 물량증가, 보일러 감암변 설계 미반영

□ 검토의견 : 승인(현황실정보고 내용)

- 상기와 같이 설계변경에 대하여 쌍문119안전센터 추진단들의 의견 반영 및 향후      관리유지 등 편리성을 감안 실정 보고 사항에 대하여 검토한바, 건축·토목·기계     설비 시설을 설계 미반영 및 설계변경 시공하는 것이 적정하다고 판단되어 승인처     리 하고자 함.

- 소방업무 특성상 24시간 상주 근무여건을 감안 직원들의 불편사항을 해소하기 위     한 설계 미반영된 보일러 감암변 등을 설치하여 변경계약 등 행정절차에 대하여      차후 시행하고자 함.

붙 임 : 1. 쌍문119안전센터 설계변경 합의각서(건축) 1부.

2. 쌍문119안전센터 신축 건축공사 물량변경 신고서 1부.

3. 기존 건축물 도면 및 변경도서(종이문서 별도)1부.  끝.