문서번호	건축부-14068
결재일자	2014.11.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
윤용훈		강성욱	11/24 김우성
협 조
	주무관			배수웅
	주무관			정광식
	주무관			김대식

『서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역』

총차 및 8차분 계약변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역』

총차 및 8차분 계약변경 시행 보고

「서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역」관련 총차 및 8차분  계약변경 시행 보고

1		용역개요

○ 용  역  명 : 서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역

○ 총용역기간 : 2008.12.30~2015.03.31 (8차 : 2014.03.07~2014.11.26)

○ 총계약금액 : 7,228,800천원

○ 계  약  자 : (주)선엔지니어링건축사사무소 외 2개사

2		추진경위

○ 2014.03. 06 : 총차 계약변경 및 8차분 계약시행 보고

○ 2014.07. 01 : 서남권 돔야구장 감리원 배치조정 요청(도기본→감리단)

○ 2014.07. 14 : 감리원 배치조정 검토 보고

○ 2014.11.24 : 감리용역 계약연장 재검토·보고(선종합건축 2014-1916호)

3		감리원 배치조정(용역비 절감) 결과

○ 조정 기간 : ‘14. 7.16 ~ 11.26

○ 조정 내용 : ‘14. 7.16일 이후 총 4인(건축2, 전기1, 통신1) 감축 또는 배치조정

○ 조정 결과 : 240,000천원 절감

(단위 : 천원)

구 분	당초 계약	2014.11.26 (8차) 준공시	증 감	비 고
8차 계약	1,159,000	919,000	240,000(감)	감리원 배치조정으로 감리비 절감

4		총차 및 8차분 계약 변경

○ 총차 및 8차 계약 변경

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
용역기간	총차	2008.12.30 ~ 2015.03.31	2008.12.30 ~ 2015.03.31	-	변경없음
	8차	2014.03.07 ~ 2014.11.26	2014.03.07 ~ 2015.01.23	58일 연장	기간연장
계약금액	총차	7,228,800	6,988,800	240,000(감)	감 액
	8차	1,159,000	1,159,000	-	변경없음

※ 총차 : 계약기간 변경없이 계약금액 240,000천원 감액

※ 8차 : 감액금액 만큼 총차 계약기간 내에서 8차 계약기간 연장(‘14.11.26→‘15. 1.23)

5		처리의견

○ ‘14. 7월 감리원을 배치조정(7.16~11.26)하여 감리비 240,000천원을 절감하였기에 총차 계약금액을 감액(7,228,800천원 → 6,988,800천원)하고,

○ 절감한 비용(240,000천원)으로 총차 계약기간 내에서 8차분 계약기간을 연장코자 함.

따로붙임  1. (총차 및 8차) 감리용역 계약연장 재검토·보고 1부.

2. 내역서 및 배치표(변경전·후) 각1부.  끝.