문서번호	마곡조성담당관-7168
결재일자	2013.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	서귀동	하종현		09/16 서노원
협 조

단지조성 공정점검(12차) 결과 보고

2013. 9.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검(12차) 결과보고

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′13. 9. 13(금) 17:00

장   소 :  마곡 1공구 현장사무실

참 석 자 : 마곡조성담당관 (토목계획팀장, 담당)

SH공사 (토목조경팀 담당)

현장소장, 현장감리단장 (1▪2공구, 빗물펌프장, U-CITY)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 44.2% ('13. 9.15 현재)

- 간선하수박스   : 1,115m중  1,075m 완료 (96.4%)

- 공동구(1공구)   : 1,158m중    955m 완료 (82.4%)

(2공구)  : 1,506m중  1,352m 완료 (89.8%)

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 16%

- 펌프장 구조물 : 2펌프장 기초 레미콘타설

- 토출암거 : 올림픽대로 지장물에 따른 BTR추진공 작업대기

○ 유비쿼터스도시건설공사(U-CITY) : 공정률 7.2%

- 1지구 정보통신인프라 관로공사 진행

Ⅱ		점검결과 및 조치

2013 추석연휴 집중호우 대비 수해안전대책 수립 이행철저

- 추석 연휴기간동안 태풍 및 집중호우에 대비하여 강우시 단계별 비상근무  인력의 신속한 대응체계 확립 등 수해대비 철저

- 공사장내 완전한 안전확보 및 현장의 사고발생이 없도록 안전관리/취약지역 점검정비 등 관리감독 철저

유비쿼터스도시건설공사는 단지 기반시설 공사와 연계되어 추진될 수 있도록 상호간 긴밀한 공정협의 추진

5호선 마곡역 출입구설치공사 관련 공항로 횡단통로 공정과 우회도로 운영기간이 연계될 수 있도록 도시철도공사와 협의 철저