투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	뉴딜일자리사업 휴게데크설치 조달구매 수량 변경

1. 조경과-5655(2014.10.30.) 및 조경과-5707(2014.11.03.)호와 관련입니다.

2. ‘뉴딜일자리사업’으로 추진중인 휴게데크 설치작업 중 현장여건에 따른 물량변경 사항이 발생(난간설치 물량 추가구매)되어 관급자재에 대하여 아래와 같이 수량변경을 요청합니다.

가. 건     명 : 뉴딜일자리사업 휴게데크설치 관급자재 조달구매

나. 계약금액 : 금15,314,250원(금액:15,232,000원, 수수료:82,250원)

변경금액 : 금19,818,440원(금액:19,712,000원, 수수료:106,440원)

다. 납품기간 : 2014. 11. 30

라. 변경내역

품 명	계약업체	수량 변경내역			비고
		당초	변경	증감
목재데크재	위드우드	136㎡	176㎡	증40㎡	(증 4,504,190원)

마. 예산과목 : 경제진흥실일자리정책과, 실업없는살기좋은서울구축, 사회적일자리제공, 서울형뉴딜일자리, 사무관리비.  끝.

	조경과장
주무관	호명옥		주무관	이옥하		조경과장	11/24 이성주
협조자	주무관	최영은		총무과장	이경로
시행	조경과-6165	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 대공원광장로102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7512	/전송	02-500-7993	/		/	대시민공개