문서번호	시설관리과-28873
결재일자	2014.11.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김헌중		최재영	11/24 이시우
협 조

설계변경 심의결과 보고(2014년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사) 3차

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

설계변경 심의결과 보고

우리 사업소에서 시설관리공단에 위탁하여 시행중인 “2014년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사”에 대하여 신규공종 및 시공물량 증 ․ 감 발생에 따라 설계변경 심의을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 2014년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사

나. 공사개요

- 당  초 : 노후밸브교체 192개소, 기아박스정비 19개소, 소화전설치보수 102개소

- 변  경 : 노후밸브교체 195개소, 기아박스정비 5개소, 소화전설치보수 116개소

다. 공사기간 : 2014.04.15 ~2015.04.30

라. 도 급 비

- 당  초 : 664,379,000원

- 변  경 : 664,379,000원(변경없음)

마. 도 급 자 : 대원공업(주) 대표 양문선

2. 심의개최

가. 심의일정 : 2014.11. 24 (월) 11 : 00 ~ 11 : 40분

나. 심의장소 : 우리사업소 3층 회의실

다. 심의위원장 : 시설관리과장

라. 심의위원 : 시설6급 최재영, 시설6급 오원선, 시설6급 김태형, 시설7급 박상권

3. 심의내용

가. 신규공종 및 계약물량 증 ․ 감에 대한 설계변경 사항으로

○ 물량변동이 적정성 여부

○ 신규공종 발생사유 및 단가적용 적정성 여부

○ 계약 변동(증 ․ 감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정 여부

○ 제정비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

나. 물량변동 사항

○ 신 규 공 종 : 이형관 부설공200mm외 72건

○ 물량증가공종 : 아스팔트 절단공종외 24건

○ 물량감소공종 : 잔토처리 공종외 41건

4. 심의결과

가. 설계변경의 타당서 : 타당

나. 신규공종 발생사유 및 단가적용 타당성 : 타당

다. 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

라. 계약 변동(증 ․ 감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정 여부 : 적정

마. 각종 제반 규정 준수 여부 : 준수

바. 관련 규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

5. 행정사항

위와 같이 설계변경 사유 및 검토항목 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 본청       재무과에 변경계약을 의뢰하고 이를 시설관리공단에 통보하여 공사시행에 만전을       기하고자 합니다.

따로붙임 : 설계변경 도서 및 설계변경 심의위원 의견서 각 1부. 끝.