문서번호	시설관리과-26443
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이승영		김태식	11/24 우종근
협조

설계변경(정산) 보고

(2014년 노량진배수지외 6개소 항청소용역)

2014. 11.

남부수도사업소

시설관리과

설계변경(정산) 보고

2014년 노량진배수지외 6개소 항청소용역에 대한 설계변경 사유가 발생하여 보고 드림

용역현황

용 역 명 : 2014년 노량진배수지외 6개소 항청소용역

용역개요

- 배수지항청소 : 274,436㎡

- 전실청소 : 36개소

용역기간 : 2014.4.2. ~ 12.31

용 역 비 : 244,630,740원

계약상대자 : 지티건설산업(주) 박인진

설계변경 사유

국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료 실정산(미가입)

상도3배수지 내부방식공사로 인한 하반기 청소 미시 행으로 청소면적 및 세정제 사용 감소

세정제 품질 시험비 반영

설계변경 금액 내역                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
공급가액	222,391,582	204,800,000	감)17,591,182
부가가치세	22,239,158	20,480,000	감)1,759,158
도 급 액	244,630,740	225,280,000	감)19,350,740

조치의견

설계변경 사유로 인하여 물량증감 및 신규공종이 발생함에 따라 설계변경 시행 전에 붙임 설계변경내역서에 대하여 자체 설계변경심의위원회를 개최하고, 심의결과에 의거 설계변경을 시행코자 함.

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

첨부 : 설계변경내역서 1부. 끝