투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	사회복지법인 대한장애인복지회 대표 배춘섭
(경유)
제 목	지연배상금(분뇨농축기동 탈취설비 제작구매 설치) 납부 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 2014. 06. 13자로 계약체결한 분뇨농축기동 탈취설비 제작구매 설치건에 대하여 다음과 같이 지연배상금이 발생되어 납부 요청하오니 해당계좌에 2014년 12월 1일까지 납부하여 주시기 바랍니다.

가. 건  명 : 분뇨농축기동 탈취설비 제작구매 설치

나. 지연배상금 납부금액 : 금2,595,300원(금이백오십구만오천삼백원)

다. 지연배상금 산출내역

- 계약금액 : 금422,000,000원

(1차납품 295,400,000원(8/5), 2차납품 84,400,000원(9/2))

- 납품기한 : 2014. 10. 11

- 납품일자 : 2014. 10. 29

- 납품검사 완료일 : 2014. 11. 21

- 지체일수 : 41일(납품기한 익일부터 검사완료일까지)

- 지체상금율 : 1.5/1,000

42,200,000원(잔액) × 1.5/1,000 × 41일(지체일수) = 2,595,300원

라. 납부방법 : 계좌이체(우리은행 5************-005 서울특별시난지물재생센터

붙임  물품검사조서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	강희석		관리과장	김웅남		난지물재생센터소장	11/24 정흥순
협조자
시행	관리과-11051	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 관리과	/
전화	02-300-8512	/전송	02-300-8518	/	rkd2030@seoul.go.kr	/	부분공개