함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(토목,건축시설물 유지보수공사)

1. 우리정수센터 『토목․건축시설물 유지보수공사』에 설계변경을 시행하였기에 계약변경 계약의뢰합니다.

가. 건   명 : 토목․건축시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 당초금액 : 35,555,120원

다. 변경금액 : 23,183,110원

라. 주요변경사항 : 수로관 설치(86본에서 27본으로 59본 감), 전동셧터

보수(1개소에서 2개소로 1개소 증)건강,연금보험료

미납으로 감액(348,762원 감)

마. 계 약 자 : 건승엔지니어링㈜ 대표자 이 안 순

바. 계 약 일 : 2014.04.07

사. 착 공 일 : 2014.04.07

아. 준공기한 : 2014.12.10

자. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 기타교체비(수선유지교체비)

따로붙임 : 1. 설계변경 시행 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고 1부

4. 합의서 1부.

5. 설계변경 보고서 1부. 끝.

	정수시설과장
주무관	김왕주		정수시설과장	11/24 현인식
협조자
시행	정수시설과-8099	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개