문서번호	도로보수과-10657
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
백승만		代구희옥	11/24 조병준
협조

2014년 방호울타리 및 중앙분리대

추가정비 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

강서도로사업소

[도로보수과]

2014년 방호울타리 및 중앙분리대정비 추가 시행 계획

2014년 방호울타리 및 중앙분리대정비 공사 시행 후 남은 예산을 우리사업소 시도상 설치된 방호울타리 및 중앙분리대 중 국토해양부 차량방호안전시설 기준에 적합하지 않은 제품으로 설치된 구간을 등급제품으로 정비하여 도로부속물관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 관련근거

❍ 도로관리과-604호(2014. 1. 13.) :

2014년 방호울타리 및 중앙분리대 정비계획 및 예산 재배정

□ 예산집행 및 정비현황

○ 예산집행현황                                          (단윈:천원)

재배정일	배정액	집행금액	잔 액	비 고
2014. 1. 13.	220,000	126,481	93,518

○ 정비현황(총 734m)

구 분	위 치	노선명	등 급	연장	비고
방호울타리	양천구 여의2교 남단 좌,우측 옹벽부	국회대로	SB4등급	240m	2014.10.20. 정비완료
	강서구 개화 IC교 직전	개화로		164m
중앙분리대	강서구 마곡수명산파크 6단지 앞	수명산로		150m
	양천구 신정2동 신정교 서단	도림천로		80m
	강서구 개화동 개화IC 직전	개화로		100m

□ 중앙분리대 및 방호울타리 추가 정비개요

종 류	위 치	연 장	기존시설물		비 고
			설치년도	설치등급
방호울타리 (성토부) 설치	1. 강서구 개화로 행주대교 남단 개화 IC 곡선 구간	L= 360m	미 상
중앙 분리대 설치	2. 강서구 남부순환로 공항동 아시아나 카고 앞 곡선 구간	L= 300m	미 상

❍ 위   치 :

❍ 공사목적 : 기존 곡선 구간 내중앙분리대 및 방호울타리를 국토해양부           차량방호 안전시설 기준에 적합한 제품(SB4등급)으로 정비

❍ 연   장 : 660m

❍ 정비기간 : 2014. 11. 28. ~ 12. 12.

❍ 소요예산 :  금9,100만원

- 방호울타리(성토부,360m) 약 4,800만원

- 중앙분리대(300m)        약 4,300만원

❍ 예산과목 : 도시안전실(도로관리과), 도로시설물관리, 도로시설물안전관리 및 수준향상, 도로 및 도로부속물 관리, 차량방호울타리, 중앙분리대 설치 및 유지관리, 시설비

❍ 시행방법

- 기존 시설물 철거 및 등급제품설치 : 도로부속물유지보수(연간단가)                                 도급업체 시행

❍ 제품선정 : 국토교통부 도로안전시설 설치 및 관리지침에 규정된    등급제품 (SB4등급 이상) 중 실물충돌시험을 충족하며 디자인이 우수하고 경제적인 3S(주) 제품으로 조달구매하여 설치

※ 붙임의 제품 비교표 참조

□ 향후 계획

❍ 2014.11~12중 : 관급자재 구매 및 설치 완료

❍ 방호울타리 정비결과 제출(도로관리과) 및 도로관리시스템 보수이력 입력

별  첨 : 정비대상 위치도 및 현장사진 1부. 끝.