투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청[남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사]

우리 본부에서 시행하는 『남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 다음과 같이 납품기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건   명 : 가로등주외 17종 구매외 1건_남부순환로(개봉역앞) 구조개선

나. 연기내용

(단위:원)

건 명	납품요구번호	구 분	수량	계약금액	계약자	납품기한		식별번호
						변경전	변경후
가로등주외 17종 구매	12-14-1-39335-01	가로등 암대(1등용)	72개	20,160,000	에이컴조명	‘14.11.30	‘15.7.30	21515079
		가로등 암대(2등용)	16개	6,400,000				21515080
		보행등기구 암대	19개	3,230,000				21070887
	12-14-2-39714-00	가로등기구	96개	31,680,000				21515093
	12-14-2-39718-00	LED보행등	19개	7,315,000	세미라이팅			22385155
	12-14-2-39715-00	터널등기구	2개	280,000	강산조명			22424666
	12-14-2-39716-00	램프(150W)	2개	118,000				22474208
		램프(250W)	40개	2,480,000				22424740
		램프(350W)	56개	5,096,000				22651270
		안정기(150W)	2개	106,000				22474205
		안정기(250W)	40개	2,200,000				22474207
		안정기(350W)	56개	3,136,000				22652235
	12-14-1-39336-00	베이스카바	99개	5,445,000				21207956
	12-14-2-39717-00	가로등 자동점멸기 (감시기)	5개	19,995,000	거명하이텍			22328462
		가로등 자동점멸기 (감지기)	20개	5,980,000				22328463
가로등주 2종 구매	12-14-1-43612-00	가로등주-9.3m	8개	3,520,	에이컴조명			21525217
		가로등주-6..3m	9개	2,880,000				21525213

다. 연기사유 : 선행공정(토목) 지연으로 인한 설치 시기 미도래

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 관급자재 납품연기 보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	박태욱		환경설비과장	이달영		설비부장	11/24 박기형
협조자	경리과장	허금도
시행	설비부-13168	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 시설국 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개