투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한(총차, 1차) 연기 요청(경의선 숲길 공원조성 통신공사)

우리 본부에서 시행 중인『경의선 숲길 공원조성 통신공사』 의 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 경의선 숲길 공원조성 통신공사

2. 공사금액 : 총차￦269,963,100원(1차-￦100,000,000원)

3. 시 공 사 : ㈜다우텔레콤

4. 준공기한 연기 내용

구 분	차수	당 초	변 경	비 고
전기공사	총차	2013.09.30.~2016.03.31	2013.09.30.~2016.03.31	변동없음
	1차	2013.09.30.~2014.11.30	2013.09.30.~2015.01.10	(증)41일

5. 연기사유 : 선행 공정인 토목공사 지연으로 후속공정인 전기공사 시공여건 미조성

6. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 공정표 및 합의각서 1부. 끝

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박태욱		환경설비과장	이달영		설비부장	11/24 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-13158	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 시설국 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개