투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	폐기물 처리용역(총차 및 4차) 준공기한 연기 의뢰(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사외 1개소)

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사외 1개소 페기물처리용역에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사외 1개소 폐기물처리용역

나. 용역개요

○ 폐콘크리트 24,123.22톤, 폐아스콘 28,106.07톤

○ 혼합페기물 123.49톤, 임목페기물 50.0톤, 건설폐토석 266.11톤

다. 계 약 자 : ㈜동보이엔씨

라. 준공기한 연기의뢰 현황

구 분	용 역 비	착공년원일	당초준공기한	변경준공기한	비 고
총차	690,500,000원	‘07.12.21.	‘14.12.31.	‘15. 6.30.
4차	168,900,000원	‘13. 1.1.	‘14.12.31.	‘15. 2.28.

마. 귀책소재 및 연기사유

○ 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유 : 선행중인 토목공사 공기연장에 따른 폐기물처리용역 준공기한 연기(준공기한 연기의뢰 토목부-21255호, 2014.10.30.)

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	최광무		토목부장	11/24 노우성
협조자
시행	토목부-23159	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개