문서번호	도시철도설비부-10766
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
이재구		강재천	11/24 정찬웅
협 조
	설비공사과장			윤승범
	주무관			장병선
	주무관			정희석
	주무관			김경일

우이-신설 경전철 건설공사

기계설비 분야 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

도시철도설비부

우이-신설 경전철 건설공사

기계설비 분야 회의결과 보고

우이-신설경전철 건설공사 설비분야 공사 진행중 주요장비 구매발주 및 공정진행에 대한 회의 내용과 향후 추진계획을 보고드림

□ 설비공사 추진현황

○ 공사기간 : 2016.11.30까지

○ 기계분야 현황

공구별	도급가액	비 고
1공구	9,668백만원	정거장 3개소, 차량기지 1
2공구	10,154백만원	정거장 4개소
3공구	8,278백만원	정거장 3개소
4공구	7,688백만원	정거장 3개소
합 계	35,788백만원	정거장 13개소, 차량기지 1

○ 설비공사 추진공정

- 차량기지 : 2014년 10월부터 공사중

- 정 거 장 : 2015년 상반기 착공예정

○ 주요장비

- 차량기지 : 보일러, 공기조화기, 송풍기, 엘리베이터 등

- 정 거 장 : 필터, 공기조화기, 송풍기, 승강설비, PSD, 펌프 등

□ 회의 개요

○ 일시 : 2014.11.21.(금) 09:30~10:30

○ 참가자

- 시공사 : 현대로템 본사 신동기 부장, 1공구 현장기술자 안영철 차장

- 도시철도설비부 : 설비계획과장외 7명(참가자 별첨)

○ 장소 : 도시철도설비부 회의실

○ 안건 : 우이-신설 경전철 건설공사 기계설비 분야 추진

□ 회의내용

○ 현대로템 의견

- 주요자재 납품업체 선정을 위하여 ‘14.11.21. 현장설명과 ’14.12월 업체선정을 위한 입찰 예정임

- 주요장비 공사 및 제작업체는 경험있는 업체를 선정하여 공사 예정임

- 업체선정, 입찰 후에도 설계서 등의 잘못된 사항을 변경할 수 있음

- 우이-신설 1~4공구 기계분야를 현대로템에서 추진예정임

○ 도시철도설비부 의견

- 시공계획서 작성하여 감리원 검토 및 승인 등 절차를 이행하여 진행요함

- 관련 법규의 변경, 공기여과시설 등 주요장비 변경사항을 검토 후 공급원 승인등 절차를 이행할 것

- 자동제어, PSD 등 주요장비 및 설비는 현재 기술적으로 최신의 설비를 설치할 수 있도록 검토하여 감리 승인 받을 것

- 기계분야 공사가 진행되지 않는 2~4공구는 추후 감리 검토 후 시공계획서, 설계도서 오류사항 검토 받을 것

- 하도급 계약내용을 30일 이내에 감리단에 제출 요함

□ 조치계획

○ 시공계획서 및 자재 공급원의 감리 승인 등 절차에 따라 공사추진 지시

첨부 : 회의 참가자 명부 1부. 끝.