문서번호	조경과-5108
결재일자	2013.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
오맹렬	김흔진	이성주	양현모		09/23 안영노
협 조
	총무과장			이경로
	주무관			홍성실
	주무관			김기배

서울대공원 생태보 및 계류 정비사업 추진계획

2013. 09.

서울대공원

(조경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서울대공원 생태보 및 계류 정비사업 추진계획

동물원 외곽순환도로변 청계저수지 계류 등에 어류, 양서류 등이 원활이 유입될 수 있도록 생태보(어도)의 설치와 각종 수생생물들의 서식처를 조성함으로써 동•식물 서식처로서 생태적 기능을 복원하고, 아이들의 체험학습의 장으로 적극 활용코자 함

▷'13년 하반기 누수식 생태보 추진계획 통보[자연생태과-14625호(2013.9.9)]◁

Ⅰ		추진개요

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 서울대공원 생태보 및 계류정비사업

○ 위    치 : 청계저수지 입구 ~ 금붕어광장 연못 계류

○ 기    간 : 2013. 09. ~ 2013. 12. 30

○ 내    용 : 생태보(어도) 설치, 호안돌쌓기, 폰드조성, 초화류 식재 등

○ 소요예산 : 250,000천원(설계비14,669, 공사비 235,331)

사업 대상지	청계저수지 입구 원앙다리 콘크리트 보	외곽순환도로변 청계계류내 기존 콘크리트 보

청계저수지 계류

Ⅱ		추진방향

▢ 수생생물 이동을 가로막는 콘크리트보 등 생태계 복원

▢ 물고기가 뛰놀고 아이들이 멱 감을 수 있는 수계조성

▢ 인공화된 제방, 호안 등에 식물을 식재하여 생태적 연속성 확보

▢ 소류지, 여울, 인공습지 등 각종 수생생물의 서식처를 조성하여 생태공원, 체험학습장 등으로 활용

Ⅲ		추진방법

▢ 설계용역 : 수의계약(소액)

○ 설계용역비 : 14,669천원

○ 대     상  : 조경분야 전문 엔지니어링업체

【(주)조경설계 계림원 대표 신계식】

▢ 공사발주 : 공개경쟁입찰(긴급)

○ 공사종류 : 조경공사업

○ 공 사 비 : 235,331천원

○ 대    상 : 건설산업기본법 제9조에 의거 조경공사업 면허 등록을

필하고, 주된 사무소가 서울 또는 경기도에 소재한 업체

Ⅳ		추진일정

○ 2013. 9. 9 : 기술용역타당성심사 완료(기술심사담당관)

○ 2013. 09 : 설계업체 선정 및 설계착수

○ 2013. 10 : 설계심의 및 심사(자연생태과)

○ 2013. 10 : 설계용역 준공 및 공사발주

○ 2013. 11 ~ 12 : 공사 시행

Ⅴ		기대효과

○ 자연하천 생태복원 및 자연학습의 장으로 활용

○ 공원 이용객에 안전하고 쾌적한 공원환경 제공. 끝.