문서번호	시설과-3719
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
최종성		홍순철	11/24 변규열
협조

『서울고등법원 옥상녹화·텃밭조성공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2014. 11.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『서울고등법원 옥상녹화·텃밭조성공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

관급자재(안내판)의 납품기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사 개요

공 사 명 : 서울고등법원 옥상녹화·텃밭조성 공사

공사기간 : 2014. 09. 16 ~ 2014. 12. 14

도 급 액 : 금 513,216,900원

도 급 자 : (주)피지엠건설 대표 김경희

공사내용 : 옥상녹화·텃밭조성

Ⅱ		관급자재 계약현황

건    명 : 서울고등법원 옥상녹화·텃밭조성 공사 관급자재 조달구매

납품기한 : 2014.11.28. 까지

식별번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
22567247	멀바우판재	T21x90	255	㎡	65,900	16,804,500	납품기한내 설치
22201666	퍼걸러	4000x4000x3500	1	조	12,080,000	12,080,000	납품기한내 설치
21979310	등의자	1500x680x790	14	개	392,000	5,488,000	납품기한내 설치
22415364	옥외 안내판	300x350	1	개	231,800	231,800	납품기한 연기
22415362	온도계안내판	1500x1050	1	개	2,424,500	2,424,500	납품기한 연기
22668025	수목 안내판	120x120	202	개	40,000	8,080,000	납품기한 연기
조달수수료						231,390
합 계						45,340,190

Ⅲ		납품연기 검토

연기사유

▸ 선행공정 지연으로 옥외안내판, 온도계안내판, 수목안내판 납품기한을 본 공사         일정에 맞추어 납품기한 연기

납품기한 변경

▸ 당  초 : 2014. 11. 28

▸ 변  경 : 2014. 12. 14

지체상금 부과여부 검토

▸ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

▸ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		검토의견

계약부서(공원운영과)로 관급자재 납품기한 연기 요청하고자 함.  끝.