문서번호	방재시설부-12207
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	★방재시설부장
임봉규		신용우	11/25 임춘근
협조	의료시설과장		양기정
	주무관		신현성

장충체육관 리모델링 공사(조경)

감리사 실정내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

〔방재시설부〕

『장충체육관 리모델링공사』

감리사 실정내용 검토보고

장충체육관 리모델링공사 관련, 현장 여건(차량출입) 반영한 판석

두께조정, 은행나무 이식등에 대한 감리사 실정보고 검토결과임.

Ⅰ		관련문서

○ JCR14-391(2014.11.20)호

⇒ 조경공사 설계변경 관련 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 장충체육관 리모델링공사

○ 위    치 : 중구 장충동 2가 200-102

○ 규    모 : 연면적 9,775㎡, 지하2층/지상3층

○ 공사기간 : 2012.05.30 ~ 2014.12.31

○ 도 급 액 : 32,600백만원 (조경269백만원)

○ 시 공 사 : (주)성지건설

○ 감 리 사 : (주)펨코엔지니어링, (주)ITM코퍼레이션

○ 조경공사

- 수목식재 : 교목 ~ 소나무외 4종 33주,  관목 ~ 회양목외 5종 5,570주

초화류 ~ 맥문동외 4종 2,550본

- 시설물 : 화강석판석포장(1,789㎡)외 9종

Ⅲ		실정내용 및 검토결과

구 분	실정보고(감리)	검토결과	비 고
식재공사 포장공사 사급자재	◦ 소나무 수량변경 - 소나무(H9.0ⅹR35)2주 → 소나무(H9.0ⅹR35)3주 - 소나무(H8.0ⅹR25)4주 → 0주 ◦ 은행나무 - 이식 (H7.0ⅹB30) 3주 - 식재 (H5.5ⅹB18) 6주 ◦ 화강석 판석포장(T30) 534㎡ → 화강석 판석포장(T50) 534㎡ ◦ 재료분리 경계석 (직선) 161m ◦ 재료분리 경계석 (곡선) 8m ◦ 인조화강석 블럭 (T80) 103㎡ ◦ 화강석판석 (T50) 587㎡ ◦ 재료분리 경계석 (직선) 161m ◦ 재료분리 경계석 (곡선) 8m	◦ 주차장 출입구 변경에 따른 지장수목 이식, 차량 진출입시 화강석판석 포장파손을 우려한 포장두께 조정, 식재여건을 고려한 소나무 수량조정등 현장여건을 반영한 사항으로 타당성이 있다고 판단됨.

Ⅳ		물량 및 공사비

□ 물량변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증▽감	비고
	주요 내용	금액	주요 내용	금액
식재 (이식)	- 소나무(H9.0ⅹR35) 2주 - 소나무(H8.0ⅹR25) 4주	10,691	- 소나무(H9.0ⅹR35) 3주 - 은행나무(B30) 3주 - 은행나무(B18) 6주	15,465	4,774
시설물 (포장)	- 화강석 판석포장(T30) 534㎡	25,528	- 화강석 판석포장(T50) 534㎡ - 재료분리 경계석 (직선) 161m - 재료분리 경계석 (곡선) 8m	49,475	24,217
사급 자재	- 화강석 판석포장(T30) 587㎡	22,522	- 화강석 판석포장(T50) 587㎡ - 재료분리 경계석 (직선) 161m - 재료분리 경계석 (곡선) 8m - 인조화강석 블록(T80) 103㎡	32,668	10,146

□ 공사비 증감내역

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	58,472	97,610	39,137
제 경 비	16,437	31,529	15,092
도 급 액	74,910	129,140	증 54,230	부가세포함

(단위 : 천원)

Ⅴ		검토의견

○ 감리 실정내용과 같이 주차장 출입구 변경에 따른 지장수목 이식, 차량출입에

따른 화강석판석 두께 조정. 소나무 수량조정등 현장여건을 반영한 사항으로 타      당성 있음으로 승인하고 변경내역에 대하여는 설계변경심의 소위원회를 개최,       적정성을 심의 하고자함.

○ 신규단가는 협의율 적용

계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를

기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액     의 100분의50으로 한다.(공사계약일반조건 제20조 제1항).

붙  임 : 내역서 1부. 끝.