함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 전기공사_전체, 4차분)

1. 우리본부에서 시행중인 『암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 전기공사』에

대해 설계변경(총차, 4차)를 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 사 업 명 : 암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 전기공사

나. 개    요 : 전력간선 1식, 동력선로 1식, 계측제어선로 1식

다. 사업현황

구분	공 사 기 간	계약금액	관련 내용	비 고
총차	2009. 11. 09 ~ 2014. 06. 30	6,068,657,000
1차	2009. 11. 09 ~ 2010. 12. 30	1,549,000,000	준 공
2차	2011. 01. 01 ~ 2012. 12. 31	1,150,000,000	준 공
3차	2013. 02. 06 ~ 2013. 12. 31	2,040,223,000	준 공
4차	2014. 01. 28 ~ 2014. 11. 25	1,329,434,000	금 회

라. 예산과목 : 기계장치(암사정수센터 고도정수처리시설공사),시설비및부대비,시설비

마. 계 약 자 : 육일전력(주) 대표 박 봉 기

바. 감 리 사 : (주)범한엔지니어링

사. 설계변경 내역(전체, 4차분)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 차	6,068,657,000	5,793,947,000	감) 274,710,000
1 차	1,549,000,000	1,549,000,000	-	‘10년 준공
2 차	1,150,000,000	1,150,000,000	-	‘12년 준공
3 차	2,040,223,000	2,040,223,000	-	‘13년 준공
4 차	1,329,434,000	1,054,724,000	감) 274,710,000	금 회

아. 설계변경사유

- 실정보고 승인 건 계약금액 조정 심의 결과 반영

- 총차분 및 4차분 분공에 따른 제경비 정산

- 간접비 반영

- 간접비 반영부분은 공기연장으로 인한 실제 현장에 투입된 근무자의               간접비로서 기존 도급액(공사비)부분과는 별도(일반관리비,부가세, 이윤  등                미포함)로 지출되는 금액임.(보고서 참조)

붙임  1. 총차 및 4차 준공정산 설계변경 보고 1부.

2. 공기연장에 따른 간접비 검토보고서 1부.

3. 설계변경 감리검토의견서 1부.

4. 내역서 1부.

5. 변경합의서 1부(총차,4차-전기). 끝.

주무관							서기종				주무관					이호식					기전설비과장					서대훈					생산부장						박용철
상수도사업본부부본부장							11/25 정득모
협조자				주무관							오환석					주무관							박은미					주무관								김성민
재무회계과장							조두업
시행			기전설비과-7949										(						)		접수												(						)
우	120-030					서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)																/
전화		02-3146-1337							/전송			02-3146-1319					/														/	대시민공개