문서번호	도시철도토목부-12903
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		토목1과장		도시철도토목부장
황왕연		김성호		11/25 한동근
협 조

『지하철9호선 917공구 건설공사』

아시아공원 복구계획 검토보고

2014. 11

서울시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

아시아공원 복구계획 검토보고

[지하철9호선 2단계 917공구]

지하철 917공구 건설공사 930정거장으로 편입된 아시아공원 부지 원상복구와 관련 책임감리원으로부터 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 선진철감 2014-573호(‘14.11.21), 및 송파구청 푸른도시과-13753호(’14.110.21)

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 서울지하철9호선 2단계 917공구 건설공사

○ 위    치 : 강남구 삼성동 광동한방병원~송파구 잠실동 아시아선수촌(아)

○ 공사규모 : 총 연장 1,590m(본선 1,425m  정거장 1개소 165m)

○ 도 급 비 : 114,972백만원(9차 31,700백만원)

○ 시 공 사 : 지에스건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : (주)선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 2개사

○ 공사기간 : 2008.06.02 ~ 2014.12.31

(9차 : 2013.03.08~2014.11.28)

○ 공 정 율 : 95.9%(2014.11.21 현재)

Ⅱ		추진경위

○ ‘08.05.30 : 공사계약(총괄분)

○ ‘09.11.11 : 행정2부시장 방침(제604호)

- 930정거장 위치이동 방침

○ ‘10.02.18 : 공원 점용허가(정거장, 송파구→본부)

○ ‘11.08.02 : 공원 원상복구계획 제출(본부→송파)

- 아시아근린공원 재조정계획에 맞추어 복구계획 제출

○ ‘13.02.20 : 공원 추가점용 허가(출입구, 송파구→본부)

○ ‘14.02.18 : 점용기간 연장승인(송파구→본부)

○ ‘14.09월 : 본부 공사관리관 구청방문 복구계획 협의

- 아시아근린공원 재조성계획 시기 불확정으로 현재의 공원에 맞추어 복구계획 수립 협의

○ ‘14.10.02 : 공원 복구계획 통보(본부→송파구청)

○ ‘14.10.21 : 송파구청 추가부분 복구 요청(송파구청→본부)

○ ‘14.11.05 : 본부 공사관리관 구청방문 추가요청부분에 대한 협의

○ ‘14.11.21 : 책임감리원 실정보고(감리→본부)

Ⅲ		부지점용 현황

○ 위    치 : 송파구 잠실동 84

○ 점용면적 : 1,534㎡

※ 송파구 추가 복구 요구 : 3,838㎡(교통초소 주변 1,201㎡, 인접산책로 1,407㎡, 벤치 주변 1,230㎡)

○ 점용기간 : ‘10. 02. 22 ~ ’14. 12. 31

○ 수목이식현황(141주 및 관목 1식)

- 930정거장 : 소나무 외 7종 87주, 관목 1식,

- 출 입 구 : 감나무 외 3종 37주

- 연결통로 : 은행나무 17주, 관목 1식

○ 복구방안 : 송파구청 요구사항을 일부 반영하여 복구

당 초	변 경

Ⅳ		책임감리원 의견

○ 송파구청 요구사항을 설계에 일부 반영후 복구

- 송파구 요구사항 처리의견

구 분	송파구 요구사항	조 치 계 획
일반사항	○복구범위 확대요청 -교통초소 부분까지 정비요망 -점유부분과 인접된 산책로 재포장 요망	○일부 반영 (복구범위 조정) -교통초소부분(1,201㎡)복구 곤란 -인접산책로(1,407㎡)는 지하철 출입구와 연계되는 관계로 고무칩 포장(두께15mm) 덧씌우기
	○LID기법 반영요망 ※LID기법: 산책로를 녹지대보다 높게 설치하여 빗물이 녹지대로 유입되도록 하는 기법	○반 영 -시공시 반영
	○복구공사 시기 불투명	○결빙전 식재 완료예정(‘14.12월중)
식 재	○소나무 추가 식재(H8×R30이상)	○일부 반영 -추가식재 :10주(R25) 적용 •소나무(H8×R30):3,011,484원/주 •소나무(H8×R25):2,013,536원/주
	○이팝나무 등 청단풍, 홍단풍은 R15로 규격 상향조정	○일부 반영 -청단풍(H3.0×R10) : 14주 -홍단풍(H3.0×R10) : 12주 -이팜나무(H3.5×R10) : 16주
	○자작나무는 대상지 평균기온 등을 고려할 때 생육 저하가 우려되므로 교체 검토	○반영(자작→팥배나무 24주 교체) -자작나무(H4.0×B10):259,053원/주 -팥배나무(H4.0×B10):256,660원/주
	○뽕나무 등 지역 역사성과 관련된수종으로 교목 추가반영	○반영(뽕나무 10주 추가식재) -뽕나무 H3.5×R8: 262,317원/주
	○공원내 기존 수목에 대해서는 현장 내에서 재배치 검토	○ 미반영 -전체적으로 재정비에 해당되므로 미반영
	○전체적으로 녹지대가 피복될 수 있도록 관목 및 지피류 추가 식재 및 수종 재검토	○일부 반영 -지하철공사 구간 관목 및 지피류식재 •남천, 눈주목, 백철쭉, 산철쭉, 맥문동, 조팝나무, 화살나무, 맥문동등 식재

구 분	송파구 요구사항	조 치 계 획
시설물	○체력단련시설(야외형 운동기구)설치	○미반영
	○경관석은 규격 및 이미지 구체화	○반 영 -경관석 100×90×60 : 6개 -경관석 130×100×70 : 6개
	○확대복구 대상지는 기존 노후 휴게시설 교체 및 추가설치 검토	○반 영 -노후시설 철거후 뽕나무 10주 추가 식재
	○파고라내 의자배치 및 지붕의 길이는 빗물이 들이치지 않도록하고 채광창 색상은 직사광선을 피할 수 있도록 색상톤으로 검토	○반 영 -파고라내 의자(1500×432) 3개배치 -파고라 길이 및 채광창 반영
기 타	○포장공사시 보도공사 설계,시공매뉴얼 참고하여 시공할 수 있도록 검토	○반 영 -보도 및 포장 전문가 배치 및 의견반영
	○CCTV설치검토	○미반영 -광통시망 추가설치 등으로 미반영
	○공원등 설치검토 -디자인을 고급화하고 컷오프형의제품으로 선정 -적정 조도를 유지하고 서울시 공원등 설치기준에 의거 설치	○일부 반영 -공공디자인 심의 대상이 아닌 제품 으로 설치(13등)
	○기존 배수체계를 고려하여 집수정,우수트랜치 등 배수시설 설치검토	○반 영 -산책로중 저지대에 빗물받이 등 배수 시설 설치

- 공사비

(백만원)

구 분	당 초		변 경(협의율 86%)		비 고 (증,감)
	수 량	공사비	수 량	공사비
수목이식	-이식(감나무외9종) 25주	24	-	-	감)24
수목식재	○교목 22주 -은행나무 3주 -자작나무 8주 -튤리나무 2주 -버즘나무 9주	116	○교목 142주 -소나무(장송) 10주 -소나무 21주 -뽕나무 10주 -상수리나무 35주 -이팝나무 16주 -팥배나무 24주 -단풍(청,홍) 26주 ○관목 23,840주 -철쭉 1,630주외 8종	124	증) 8

구 분	당 초		변 경(협의율 86%)		비 고 (증,감)
	수 량	공사비	수 량	공사비
시설물공사	○등의자 2개 ○녹지경계석 152m ○플랜터 54개 ○볼라브 2개	20	○파고라 1개 ○평의자 3개 ○등의자 8개 ○경관석 12개	17	감) 3
포장공사	○고무칩 포장(T75) 233㎡	30	○고무칩 포장(T13) 139㎡ ○고무칩 포장(T15) 1,267㎡ ○투수블럭 포장 2a ○잔디블럭(T150) 39㎡ ○황토포장(T100) 233㎡ ○녹지경계석 437m	121	증)91
전기공사	○공원등 이설 1식	11	○동원등 설치 13등	64	증)53
철거및수목제거	-	-	○수목제거 4주 ○블럭걷기 87㎡	2	증) 2
직접공사비		201		328	증)127
제 경 비		61		67	증) 6
소 계		262		395	증)133

○ 신규비목 반영

구 분	관련규정	시공사 요구	책임감리원 의견	비고
신규비목	○국가를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제91조(설계변경으로 인한 계약금액 조정의 제한) 제3항3호 규정에 따라 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가	○국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제65조 3항에 따라 신규비목 단가에 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률(72%)을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50에 해당하는 86%적용 요망	○시공사 요구율(86%)을 적용함이 타당

Ⅵ		조치계획

○ 책임감리원 의견과 같이 930정거장으로 편입된 아시아공원 부지에 대하여 송파구청 의견을 일부반영하여 원상복구토록 승인하고자 하며, 추가비용(133백만원)은 추후 계약금액 조정시 예산 범위내에서 반영조치코자 함

첨부  1) 책임감리 검토의견  1부.

2) 현황도면  1부.   끝.