투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설경전철 주식회사 대표
(경유)
제목	우이-신설 공기연장 시스템분야 공정표 수정 요구

1. 우이공사 제2014-901호(2014.10.31.)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 “우이신설 민간투자사업”관련으로 우리부로 제출한 26.5개월 연장공정표에 대하여 2014. 11. 17. 시스템분야 공정표 적정성 회의를 실시한 결과 아래와 같은 문제가 있어 수용이 불가하오니 금차 실시계획 변경이 완료되기 전까지 실시협약 제23조(공정관리)에 따라 시스템공구 감리단에서 검토·확인한 공기연장 공정표를 수정·보완하여 다시 제출하시기 바랍니다.

아          래  -

가. 주요공정 시공순서가 모순되고 연계되지 않음.

- 궤도설치, 변전실 수전 및 기능실 급전, 연동시험, 열차 시운전 등

절차 모순

나. 시운전기간이 당초 14개월 대비 과도하게 단축됨(재검토).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김한수		신호과장	김영하		도시철도설비부장	11/25 정찬웅
협조자	정보통신과장	이용기		설비공사과장	윤승범		설비계획과장	강재천
차량과장	황영일		시설전기과장	서태창		송변전과장	김형기
시행	도시철도설비부-10780	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산 5-85 서울시청 남산별관 4층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7327	/전송	02-772-7308	/	hansvii@seoul.go.kr	/	대시민공개