함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용역 변경계약 체결 보고[광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역]

1. 정수시설과-2980(2014. 11. 21.)호와 관련입니다.

2. 『광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역』에 대하여 아래와 같이 변경(준공기한 연장)계약을 체결하고 보고합니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역

- 계약금액 : 금122,428,000원(금일억이천이백사십이만팔천원)

- 용역기간 : 2014. 06. 05. ~ 2014. 12. 01.

- 계약상대자 : 주식회사 한국시설안전연구원 안평기

에스큐엔지니어링(주) 이래철

나. 용역 준공기한 변경 내역

구 분	용 역 기 간	비 고
당 초	2014. 06. 05. ~ 2014. 12. 01.
변 경	2014. 06. 05. ~ 2014. 12. 29.

다. 연기사유 : 물청소 일정 차질 등으로 인해 현장조사가 당초 계획보다 늦어져                            절대공기 부족

붙임  1. 용역변경계약체결통보서 및 방침서 등 각 1부.  끝

주무관							유혜영				정수운영과장					손호철					광암아리수정수센터소장					11/25 차윤기
협조자				주무관							양봉우					정수시설과장							김창현
시행			정수운영과-9425										(						)		접수												(						)
우	465-230					경기도 하남시 서하남로 293																/
전화		02-3146-5313							/전송			02-3146-5309					/														/	대시민공개