문서번호	주거환경과-8308
결재일자	2013.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주거환경지원팀장	주거환경과장	주거재생정책관
고병호	송종훈	최성태	09/25 진희선

주민참여형재생사업 지구단위계획 수립용역(영등포구 대림동)

준공기한 연기 검토보고

2013.9

주택정책실

(주거환경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(	㈜종합건축사사무소 건원	)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방계약법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

주민참여형재생사업 지구단위계획 수립용역(영등포구 대림동 )

준공기한 연기 검토보고

중국동포 밀집지역인 영등포구 대림동 주민참여형 재생사업 지구단위계획 수립용역에 대한 준공기한 연기사유가 있어 검토보고 드림.

Ⅰ		구역개요

□ 위치: 영등포구 대림2동 1027-1번지 일대 □ 규모: 42,959㎡, 228동 □ 지역/지구: 2종일반,최고고도지구 □ 인구/세대수: 679세대 총 2,149명 □ 비고 : 중국동포 밀집지역

Ⅱ		용역현황

□ 용 역 명 : 주민참여형재생사업 지구단위계획 수립용역(영등포구 대림동)

□ 용역기간 : ‘12. 8. 20 ~ ’13. 9. 30

□ 사 업 비 : 금 182,000,000원(부가세 포함)

□ 추진현황

❍ ‘12.08.20 : 용역계약 및 착수

❍ ‘12.11~’13.08 : 주민워크샵(총 11회),MP회의(총 10회)

❍ ‘13.06.15 : 용역 준공연기(’13.6.15 → ‘13.9.30)

※ 주민공용이용시설 설치방안(주차장 증축 등) 검토 및 마을축제 지원 등 소요기간 추가

❍ ‘13.08.05 : 주민공람 및 유관부서 협의(~8.19)

❍ ‘13.09.11 : 도시건축공동위원회 심의(조건부 가결)

❍ ‘13.09.16 : 마을사랑방 개소식(구청장 및 주민30여명 참석)

Ⅲ		준공기한 연기보고

□ 연기사유

❍ 도시건축공동위원회(9.11) 심의의견 검토 및 반영

※ 심의의견

① 노후건축물의 안전진단 및 방범강화에 대한 공공사업 지원가능여부 검토할 것.

② 대림중앙시장 등에 유사시 소방대응이 가능한 방안 검토할 것.

❍ 주민공동체 활성화 지원

- 기 확보된 마을사랑방(′13.9.16)을 통해 주민공동체 자립기반 구축 및 마을잔치(′13.10.6) 추진 지원

※ 마을사랑방운영위원회 : 총20명(중국동포 4명 포함)

※ 마을축제 : 음식나눔 및 전통놀이, 노래자랑 및 공연(두만강예술단) 등

❍ 중국동포 실태조사 학술용역 용역 보완

- 인터뷰 내용 보완 및 분석, 주민공동이용시설과 연계한 공동체 프로그램 발굴 등

□ 준공기한 연기

당초	변경	비고
′12. 8. 20 ~′13. 9. 30	′12. 8. 20 ~′13. 11. 30	2개월 연장

□ 연기사유 귀책소재 : 우리시

□ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		향후일정

□ ‘13. 10월 : 마을축제 및 중국동포 학술용역 보고, 실시설계 발주

□ ‘13. 11월 : 정비구역 지정 및 계획결정

붙임 :  준공기한 연기요청공문(따로붙임) 1부.  끝.