투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한연기에 따른 변경계약 요청(두모교외 1개소 내진성능개선공사 책입감리용역)

1. 교량보수과-7482(2014.11.24)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 “두모교 외 1개소 내진성능개선공사 책임감리용역” 의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니  조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선공사 책임감리용역

나. 도 급 자 : 신명건설기술공사(주) 대표 김장흥

다. 준공기한 변경(도급비 변경없음)

- 당초 : 2013.6.12. ~ 2014. 11.30.

- 변경 : 2013.6.12. ~ 2015. 02.06.

마. 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물 운영, 도로시설물 내진성능개선, 시설 비 및 부대비, 감리비

사. 공기연장사유 : 감리대상공사인 “두모교 내진성능개선공사”의 준공기한

연장에 따라 용역기간 연장

붙임 : 1. 준공기한연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 보고서 1부.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	백운경		교량보수과장	이수근		서부도로사업소장	11/25 김만수
협조자
시행	교량보수과-7508	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개