문서번호	물재생과-6564
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
홍민표		김근수	11/25 강병수
협조

관급자재 정산 보고서

- 청계천 하류횡단 차집관거 개선공사(1,2차분) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

중랑물재생센터

물재생과

우리 센터에서 시행중인「청계천 하류횡단 차집관거 개선공사」일환 ‘14년 1차분공사(한양여대앞), 2차분(살곶이공원앞 이설공사중 일부) 준공예정(12월)에 따른 관급자재(레미콘, 이형철근) 물량증·감 사항을 반영 변경계약 체결 정산처리하여 ’15년 잔여 장래분 공사에 반영하여 공사에 만전을 기하고자함.

관급자재 정산 보고서

1		공사개요

○ 공 사 명 : 청계천 하류횡단 차집관거 개선공사

○ 총공사비 : 4,241백만원

(도급비:3,262백만원, 관급비:507백만원, 이설비:135백만원, 폐기물처리비:337백만원)

○ 시 공 사 : 아이에스동서(주) 대표 권민석

○ 공사기간 : 2013. 12. 16 ～ 2016. 8. 31.

- 1차분 : 2013. 12. 16 ~ 2015. 2. 28.(한양여대앞 차집관거 이설)

- 2차분 : 2014. 4. 7 ~ 2014. 12. 31.(한양여대앞 및 살곶이공원앞 이설 일부)

- 장래분 : 2015. 1 ~2016. 8. 31.(살곶이공원 잔여분)

2		보고내용

○ 관급자재(레미콘, 이형철근) 물량증감 사항 발생 사유 :

가. 한양여대앞 시점부 관로 현황 상이에 따른 대형 맨홀신설 및 연장축소 반영

- 한양여대앞 시점부 기존 차집 관로현황이 당초 설계와 상이(Box2.4*2.4→ D=1,350mm*3열)대형 맨홀설치 및 RC박스 연장 축소 반영에 따른 증감 사항 반영

나. 살곶이공원 앞 청계천 재용수 관로 중첩에 따른 선형변경 반영

- 살곶이공원앞 이설차집관로 노선이 청계천 용수공급관(1,100mm)과 중첩 선형변경으로 차집관거 이설 연장축소(RC+PC박스:189.2m→163.2m)에 따른 관급자재 감소물량 반영

다. 기타 물량 증·감사항 반영

○ 관급자재 변경 현황

구 분		단위	당 초	변 경	증 ․ 감
레미콘	25-18-12	㎥	256.85	230.52	-26.33
	25-24-12	㎥	786.10	739.25	-46.85
철 근	D13	ton	18.869	12.064	-6.805
	D16	ton	23.237	14.546	-8.691
	D19	ton	10.481	30.041	19.56
	D22	ton	4.882	9.444	4.562
	계	ton	57.469	66.095	8.626

○ 관급자재 사용현황 및 계획

구 분		설계수량 (A)	단위	‘14년 (B)	‘15년(장래분) (C=A-B)
레미콘	25-18-12	230.52	㎥	211.24	19.28
	25-24-12	739.25	㎥	656.99	82.26
철 근	D13	12.064	ton	9.25	2.814
	D16	14.546	ton	12.866	1.68
	D19	30.041	ton	21.394	8.647
	D22	9.444	ton	6.488	2.956
	계	66.095	ton	49.998	16.097

3		조치내용

○ 위와 같이 관급자재 변경(설계)수량에 맞게 계약물량 증감사항 반영 변경계약하고, 또한 당해연도(‘14년) 관급자재 정산처리에 따라 감액되는 예산(19,256천원)을 도급비로 전환 예산을 활용하고,

○ 「청계천 하류횡단 차집관거 개선공사」일환 잔여 관급자재는 ‘15년 예산에 반영 관급자재 구매하여 공사에 만전을 기하고자함.

붙  임 : 관급자재 총괄 집계표 각1부.  끝.