문서번호	설비부-13264
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		권오식	11/25 박기형
협조	경리과장		허금도
	도시고속도로과장		명경출

『강남8공구 구룡지하차도 전기공사』

2013년 사고이월예산 집행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남8공구 구룡지하차도 전기공사』

2013년 사고이월예산 집행계획 보고

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』에 대한 2013년 사고이월예산 집행에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사

○ 위    치 : 서울시 서초구 양재동 407-17

○ 규    모 : 수전설비 700KVA, 터널등 967등, 가로등 84등, 기타 1식

○ 공사기간 : 총차-‘12.08.02~’15.02.28.(3차 ‘14.03.03~’15.02.28)

○ 공 사 비 : 총차-1,098,636,천원(3차-344,467,240원)

○ 관 급 비 : 122,374,560원(가로등주외 2종)

○ 시 공 사 : ㈜동우이엘시 대표 김 규 천 / 납품사 : ㈜이엔엘

□ 사고이월 예산현황

○ 2013년 사고이월 예산 재배정 및 집행현황

(단위:원)

건 명	예산액	원인행위	집행액	잔액	비고
강남8공구 구룡지하차도 전기공사 관급자재	131,727,490	131,727,490	35,385,780	96,341,710

□ 2013년 사고이월예산 집행전망

○  강남순환8공구의 토목공정 중 방음벽 규격 미확정으로 보도공사가 이루어지지 않고 있어,

○ 가로등 공사 진행이 어려운 실정으로 이에 소요되는 관급자재(가로등주 외2종) 납품시기가 미도래하여 연도내 사고이월예산 집행이 어려울 것으로 판단됨.

□ 2013년 사고이월예산 집행계획

○ 설비부에 배정된 2013년 사고이월예산 중 미집행 잔액을 감배정하고

○ 예산의 효율적운영을 위해 연도내 집행이 가능한 토목부에 재배정하여 예산 불용방지 하고자 함.

- 2013년 사고이월 예산 감재배정 요청 현황

예산액(원)	기배정액	지출액	감배정액	재배정부서
강남8공구 구룡지하차도 전기공사 관급자재	131,283,540	35,385,780	96,341,710	도기본 토목부

○ 예산과목

- 조직)도로계획과, (정책사업)도로건설, (단위사업)도시고속도로망확충, (세부사업)강남순환도시고속도로건설, (편성목)시설비및부대비, (통계목)시설비.

□ 보고자 의견

○ 예산의 효율적운영을 위하여 건설총괄부에 감원인행위 요청하고

○ 도로계획과 및 토목부에 2013년 사고이월예산을 토목부로 예산재배정 하도록 요청 하고자 함.  끝.