문서번호	도시철도사업부-7865
결재일자	2014.11.25.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		경전철1과장	도시철도사업부장
위성환		박동룡	11/25 이은상
협조

「지하철 9호선 916공구 건설공사」 설계변경(본부) 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시철도국

(도시철도사업부)

「지하철 9호선 916공구 건설공사」

설계변경(본부)자문회의 결과 보고

우리본부에서 시행중에 있는 서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사구간 중 929정거장과 코엑스몰간 연결 출입구 설치 변경 관련 설계변경자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1		사업개요

○ 연결통로 개요

당 초 (916공구)	변 경 (무역협회 설계)
․ 규 모 : 폭 13.6m, 면적 558㎡ ․ 편의시설 : EV1대, ES 2대	․ 규 모 : 폭 15~19m, 면적 876㎡ ․ 편의시설 : EV 1대, ES 2대

○ 시 공 사 : 현대산업개발(주)외 2 (감리사 : ㈜유신)

2		자문회의개요

○ 일    자 : 2014. 11. 21(금) 17:00 ~ 19:00

○ 장    소 : 도시철도 사업부 회의실

○ 자문안건 : 9호선 2단계 916공구 건설공사 929정거장과 코엑스몰간 연결 출입구 설치 변경 관련 설계변경 자문

○ 자문위원

- 내부 : 도시철도사업부장,경전철2과장,협상진단과장(간사:경전철1과장)

- 외부 : 대보기술단 정종주대표, 도화엔지니어링 유제남부사장

도명건설 이섬범사장,  건화 이상환전무

- 공사관계자 : 감리단장, 현장대리인외 2명

3		자문결과(주요내용)

○ 공  통

- 과업범위 및 당초 공사비 24억에 대하여 본부와 시공사간의 협의 처리 하는 것에 대한 검토 필요

- 가시설 도면(토류벽,지반보강공법)의 설명자료와 도면이 상이함으로 재검토 요망

○ 이 섬 범 위원

- 코엑스연결통로에 대한 도면과 수량산출서간 상이한부분에 대하여 감리단 확인 검토 후 반영

○ 유 제 남 위원

- 굴착 보강계획 중 전력구 인접부분은 전력구 시설의 안전성확보를 위한 지반보강 및 계측관리 보완 요망

- 설계(구조 및 가시설)및 공사비 산출에 대한 감리단의 전문가 검토요망

○ 이 상 환 위원

- 연결통로의 신설에 따라 기시공된 정거장 구조물의 주철근배근에 영향이 있을 수 있으므로 연결통로 개구부에 대한 구조 검토요망

○ 정 종 주 위원

- 가시설도면 A-A’ 단면의 지간 ℓ=2.3m로 안정하게 검토되었지만 코엑스몰쪽 통로작업구 색션의 지간ℓ=5.0m정도로 불안정할 것으로 생각되므로 구조 검토 후 중간 엄지말툭을 박아 사보강재로 보강 필요

- 계측계획에 기존건물 경사계, 균열계 등을 추가 필요

○ 박 용 택 위원

- 계약의 범위에 관한 사항이 당초 계약에 포함되지 않는 것으로 결론이 날 경우 증가된 공사물량에 대해서는 신규단가 적용 검토요망

○ 이 승 우 위원

- 연결통로 설치구간에 저촉되어 이설한 하수관의 경사가 1.59%로서 완만하여 유수소통에 지장이 있을 것으로 보이는데 문제가 없는지 검토 필요

- 연결통로 공사완공기한이 촉박함에 따라 공사중 교통처리,계측,감리강화 등 공사관리계획을 면밀히 수립하여 안전사고 방지토록 할 것

4		행정사항

○ 자문위원 의견서를 도시철도 토목부에 통보하여 조치토록 함.

붙 임 :1) 자문위원 의견서 6부.

2) 자문회의 참석자 명단 1부.

3) 사진 1매.   끝.