문서번호	정보시스템담당관-14054
결재일자	2014.11.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원관리팀장	정보시스템담당관
김대원		고보영	11/25 代서병철
협조	정보자원운영과장		代임하정
	주무관		양동섭

시군구재해복구시스템(시 설치분) 서버 증설 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11

정 보 기 획 단

(정보시스템담당관)

시군구재해복구시스템(시 설치분) 서버 증설 계획

행정자치부의 전국 지자체 공통사업인「시도·새올 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안강화 사업」진행에 따른 우리시 시군구재해복구시스템(시 설치분) 서버 증설 계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍ 안전행정부「시도·새올 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 추진 계획」(전자정부지원과-868, ‘14. 3.18.)

❍ 한국지역정보개발원「시도새올 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 사업 전산장비 도입지침 안내」(정보자원부-1575, ‘14.11.11)

❍ 한국지역정보개발원「시군구 재해복구시스템 서버증설 협조 요청」     (정보자원부-1884, ‘14.11.11)

추진경과

❍ ‘14. 8. 8. - 시군구 재해복구시스템(시 설치분) 서버증설 및 정보보안 강화사업 위·수탁 협약 체결

❍ ‘14.11. 3. - ’14년도 시군구재해복구시스템(시 설치분) 서버증설 및 정보보안 강화사업 위탁사업비 지급(시행)

❍ ‘14.11.13. - 시도행정정보시스템 정보보안 강화사업 추진 계획 수립

❍ ‘14.11.24. - 시도행정정보시스템 정보보안 강화사업 작업 결과 보고

개  요

❍ 추진사유 : 서대문구 새올 공통기반 노후장비 교체 시 기존 제조사(IBM)와 다른(HP) 제품 도입이 결정됨에 따라 우리시 시군구재해복구시스템(시 설치분) 내 재해복구용 HP 서버 증설 필요

❍ 추진내용

- 시군구 재해복구시스템(시 설치분) DB서버(HP BL870) 1식 증설

- 서대문구 ↔ 시군구재해복구시스템(데이터센터) 간 재해복구 체계 구성

추진 체계

				위탁기관
				안전행정부(전자정부지원과)
서울시				주관기관(수탁 수행기관)
				한국지역정보개발원(정보자원부)
시도․새올 유지관리 사업단				HW구축 사업자 (통합 사업자)							분리발주 SW 사업자 (정보보안강화 등)

Ⅱ		작 업 계 획

서버입주 사전 환경조사 실시

❍ 일  시 : ‘14.11.26.(수) 14:00 ~ 18:00

❍ 장  소 : 데이터센터 2층 전산실

❍ 참석자 : 이긍로 부장 외 3명(한국지역정보개발원 노후장비교체사업단),양동섭(정보시스템담당관)

데이터센터 사전 입주 검토 진행

❍ 기  간 : ‘14.11.26.(수) ~ ’14.12. 5.(금)

❍ 내  용 : 시군구 재해복구시스템(시 설치분) DB 서버 증설

시군구 재해복구시스템(시 설치분) DB서버 증설

❍ 일  자 : 입주 승인일 ~ ‘14.12.12.

❍ 대  상 : 시군구 재해복구시스템(시 설치분) DB서버

❍ 장  소 : 데이터센터 전산실(2층)

❍ 내  용

- 기존 시군구 재해복구시스템 DB서버 OS 업그레이드 (AIX 5.3→6.1)

- 신규 DB서버 장비 납품·설치 및 시군구 재해복구 재구성

※ 상세 내역은 [붙임1, 2] 참조

❍ 업무영향 : 없음

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 데이터 동기화 및 재해복구 시스템 점검	: 설치 후 3~5일

❍ 사업 종료	: ‘14.12.31.

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 시군구 재해복구시스템 재구성 작업 준비 (정보시스템담당관)

- 재해복구서버 구성을 위한 IP 확보, 포트 개방 등 조치

❍ 시군구 재해복구 서버 증설 납품·설치 협조 (데이터센터 정보자원운영과)

- 재해복구시스템 DB서버 증설 입주 검토 및 승인

- 사전환경조사, 장비 반입, 현장 및 노후장비교체사업단 작업 협조 등

붙임:  1. 시군구 재해복구시스템 서버증설 작업계획서 1부.

2. 침입차단시스템 포트허용 및 IP제공 요청 내역 1부.

3. 관련 공문 2부.  끝.