투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(양화 한강공원 친수공간 조성 전기공사)

우리 본부에서 추진 중인 『양화한강공원 친수공간 조성 전기공사』에 사용

되는 관급 자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 납품기한 연기요청 현황

계약번호	건 명	품명	규 격	수 량	납 품 기 한		비고
					당 초	변 경
12142187600	양화한강공원cctv구매설치	영상감시장치	카메라2대	1식	‘14.12.02	‘14.12.28
00137053501	공원등기구	등기구	70w LOW7010	54개	‘14.11.30	‘14.12.28
00145065003	가로등주및부속자재	등주	HJS-0042-2 5M2등용	27본	‘14.11.30	‘14.12.28

2. 연기사유 : 사용시기 미도래.  끝.

	생태공원과장
주무관	임이환		생태공원과장	11/25 최병언
협조자
시행	생태공원과-2674	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25	/
전화	3780-0725	/전송	3780-0740	/		/	대시민공개