내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관로 공사관련 업무협조

1. 보도환경개선과(2014.10.22.)호와 관련입니다.

2. 동절기에 부득이 하게 시행예정인 하수관로 공사장 현황을 아래와 같이 제출하오니 침수예방사업임을 감안하여 closing 11 이후에도 공사할 수 있도록 조치하여 주시기 바라며,

3. 해당 자치구에서는 시민불편사항 최소화 등 공사장 관리에 철저를 기하시길 바랍니다.

가. 보도구간 동절기 하수관로 공사장 현황

연번	공사명	자치구 (담당)	완료예정일 (보도구간)	공사사유
1	한강로 일대 방재시설 확충사업(관로공사 1차)	용산 (조두현 2199-7912)	‘14. 12. 31	빗물펌프장 설치 반대민원으로 펌프장 유입관로공사가 지연되었으며, 공정만회를 위하여 동절기 공사시행 ○하수관로 추진 : D2400m, L=168m ○보도구간굴착 - 발진기지10m×11m, 도달기지 6m×8m ※자연재해위험지구 선정지역
2	석관동 223~332주변 침수방지공사	성북 (김상동 2241-3635)	‘14. 12. 10	하수관로 부설은 11.30까지 완료예정으로 굴착을 포함하지 않은 보도블록복구공사임 ○보도복구 B=2.5m, L=65m
3	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사(1~2단계)	강서 (박성근 2600-6950)	‘15. 2. 28	지장물(상수도 등) 이설협의 지연과 2단계 시공업체 부도로 공사추진이 지연되어 공정만회를 위하여 동절기 공사 시행 ○하수 BOX 신설 2련▣3.0×2.5m, L=150m ○보도구간굴착 B=2.0m, L=120m ※자연재해위험지구 선정지역

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	보도환경개선과장,용산구청장(안전치수과),성북구청장(안전치수과장),강서구청장(안전치수과장)
전문관	배원영		하수정비팀장	심형보		물재생계획과장	11/25 최진석
협조자	하수관리팀장	최승각
시행	물재생계획과-15088	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 시청서소문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3796	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	대시민공개