문서번호	도로보수과-10678
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
백승만		11/25 代박상구
협 조

제7차 작업지시 관련 실정보고서(2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

강서도로사업소

[도로보수과]

작업지시 관련 실정보고(제7차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014.04.07 ~ 2015.02.28

○ 시 공 사 : (주)토형이엔시 대표 김 용 훈

○ 도 급 비 : 금252,314,700원

□ 보고내용

○ 구로경찰서 경비교통과-13464호(’14.11.05)로 요청된 교통안전시설물 개선요청 등

○ 영등포구청 도로과-18145호(2014.11.20.) 관련 오목교 주변 교통개선 요청 교통안전시설물 설치(도로표지병, 가드레일 보수)

○ 기타 응답소민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

○ 보수대상 및 물량

연번	위 치	작 업 내 용	지시물량					작업조건		비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적	경간,개(㎡)	철거(경간)	주간	야간
1	구로구 구로1교 진입전	시선유도봉 설치				4
2	영등포구 오목교 동측	도로표지병설치 (2m간격)		22.00		11		■
3	강서구 개화로 김포공항 교차로 교통섬 주변	시선유도봉 설치				12		■
4	구로구 남부순환로 옹벽(개봉1동사거리~서울매봉초)	옹벽단면보수(t=10mm,벽체)			200.00			■
5		옹벽단면보수(t=30mm,벽체)			40.00			■
6		옹벽표면처리(t=0.3mm,벽체)			271.50			■

□ 조치계획

○ 위 보수대상을 도급업체에 아래와 같이 작업지시하여 보수코자하며 추후 설계변경시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사-제7차 작업지시

- 작업위치 : 구로구 구로1교 진입전 시도유도봉설치 외 5개소

- 작업기간 : 2014.11. 26 ~ 2014.12. 25

- 공종 및 물량 : “별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약37,565천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 원)

공 사 명	도 급 비	개략 집행공사비 (1차 정산 포함)	금회사용 (4차)	비고 (잔액)
2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)	252,314,700	190,112,000	37,565,000	24,637,700

첨  부 1. 제7차 작업지시서 및 위치 현황 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.  끝.