투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	난지IC 교통통제기간 연장에 따른 홍보 요청

1. 우리시에서 추진중인 월드컵대교 건설공사와 관련입니다.

2. 위 공사구간 중 난지I/C 진·출입하는 램프 및 회차로는 당초 ‘13.10.19. ~’14.11.30.까지 전면 차단하고 공사를 추진할 계획이었으나 난지도 쓰레기 매립장의 과거 매립폐기물 발생에 따른 처리기간이 추가로 소요되어 2015. 5.31.까지 부득이 교통통제기간을 연기하게 되었음을 알려드리니 대시민 홍보하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 : 2013.10.19. ~ 2014.11.30.

나. 변경 : 2013.10.19. ~ 2015. 5.31. (6개월 연장)

붙  임 : 보도자료(교통소통대책) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,서울도시고속도로 교통관리센터장
주무관	최진우		토목총괄과장	김영수		토목부장	11/25 노우성
협조자
시행	토목부-23245	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 별관2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2542	/전송	02-3708-2599	/	cjw1116@seoul.go.kr	/	대시민공개