문서번호	시설보수과-4385
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	11/25 代홍영두
협조
	기전과장		최주용

옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

성동도로사업소

(시설보수과)

옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 시행계획

□ 관련 근거 : 시설안전정책관 방침

[도로시설과-20223(2014.11.19.) 옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 추진계획 조정]

○ 옥수.금호터널 상.하행선 보행통로에 각 1개소씩 설치계획(총 960m)

○ 시민불편이 최소화 될 수 있는 방안 사업 시행

○ 부족한 사업비에 대하여는 ‘15년 추경 또는 ’16년 예산 확보토록 추진 예정

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	구분	규모(m)		구조 형식	통과 높이	준공 년도	비고
			폭	연장
옥수터널	금호4가 1261 ~옥수동 390-1	2종	22.0	165	마제형 (상.하행 독립구조)	4.5m	1984
금호터널	신당동 349-389 ~금호3가 1540-3	2종	22.0	320	마제형 (상.하행 독립구조)	6.8m	1984

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사

○ 공사개요 : 보도차단벽 및 보도정비 960m

○ 총사업비 : 2,808백만원(2014년 1,550백만원 중 설계비 55백만원)

○ 사업기간 : 2014. 3 ~ 2015. 12

○ 추진배경 : 보행로 개선요청(성동구청 토목과 3회, 120민원-윤종한외 다수)

□ 추진 현황

○ 2014.04.01. : 실시설계 용역 착수

○ 2014.07.23. : 서울시민디자인위원회 개최(조건부 채택)

○ 2014.09.12. : 자문회의 및 특정제품 선정심사위원회 개최

○ 2014.10.01. : 서울시민디자인위원회 재심의(조건부 채택)

○ 2014.10.23. : 교통소통대책 자문회의 개최(조건부 시행)

○ 2014.10.24. : 공사 위탁감독 요청

○ 2014.11.04. : 공사 계약심사 결과 통보

○ 2014.11.21. : 추진계획 조정 및 2014년 예산 재배정

□ 예산 확보 현황

(단위 : 백만원)

시 설 명	‘14년 예산 확보액 (설계비 포함)	소요예산	부족액	비고
옥수.금호터널	1,550	2,808	1,258

□ 공사비 내역

(단위 : 백만원)

구 분		옥수터널		금호터널		합 계	비고
		약수역방향	옥수역방향	약수역방향	옥수역방향
합 계		445	472	918	918	2,753
도급비계		84	88	173	173	518
관급비	방음벽	313	332	646	646	1,937
	기 타	8	9	17	17	51
폐기물처리비		2	2	4	4	12
전기공사비		22	24	45	45	136
통신공사비		16	17	33	33	99

□ 발주 계획

○ 보도차단벽 설치공사 발주

- 2014년 예산 부족에 따라 장기계속공사(제한경쟁입찰-지역제한)로 발주하고 예산 미확보로 인한 공사중단을 고려, 구간별(옥수.금호 상.하행선 구분) 공사 시행(보행인이 상대적으로 많은 약수역 방향 우선 시행)

○ 2014년 예산 배분

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	도급비	방음벽	기타	폐기물	전기	통신	비고
2014년 예산 (설계비 제외)	1,495	257	1,091	25	6	67	49

※ 약수역 방향 2개소에 대한 공사비임

[장기계속공사로 1차 발주금액 전액 이월됨을 고려, 관급자재(방음벽) 추가 구매]

□ 향후 추진 계획

○ 2014. 11월 : 공사발주

○ 2015. 06월 : 1차 공사준공(추가예산 미확보시 타절준공)

○ 2015. 12월 : 2차 공사준공

붙임  1. 옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 추진계획 조정(도로시설과) 1부.

2. 공사비 검토(총괄표) 1부. 끝.