문서번호	시설보수과-4875
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		김찬구	11/26 민승기
협조

도로표지병 변경 실정보고 검토

(금천교외 1개소 보수공사)

2014. 11.

남부도로사업소

(시설보수과)

도로표지병 변경 실정보고 검토

(금천교외 1개소 보수공사)

『금천교외 1개소 보수공사』와 관련 공사 감독중인 시설관리공단에서 도로    표지병 변경에 대한 실정보고 검토 보고 임.

■ 공사개요

○ 공 사 명 : 금천교외 1개소 보수공사

○ 공사기간 : 2014. 6. 5 ~ 2014. 12. 30

○ 공사개요 : 금천교 - 교면방수및포장 13.44a, L.M.C포장 854㎡

반포천2복개 - 교면방수및포장 74.5a, 신축이음교체21.6m

○ 도급금액 : ￦1,317,620,000원

○ 시 공 사 : 동형건설(주) 대표 이재운외 1개사

○ 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단 (공사감독1처)

■ 시설관리공단 실정보고 및 검토내용

【관련공문 : 시설관리공단 공사감독1처-12300(2014.11.21.)호】

가. 현   황

○ 설계 반영되어 있는 도로표지병은 앵커형으로 시공시 아스팔트 포장면 천공이 불가피하고, 천공시 교면 방수층의 손상이 우려되어 아스팔트 포장 내구성 확보를 위해서는 교면 방수층 손상없는 표지병 설치가 필요하고,

○ 이수교차로 특성상 통행 차량의 혼선을 방지하기 위하여 시선유도 시설(도로표지병) 추가 설치가 필요한 실정임.

나. 시공사 의견

○ 아스팔트 포장면 천공이 수반되지 않는 부착식 도로표지병을 사용하여 금회 시행한 교면방수 포장 내구성을 확보하고,

○ 통행차량 시민의 안전사고 예방 및 교차로 혼선 방지를 위하여 도로표지병을 추가 설치하고자 함.

다. 주요 수량 변동 사항

공 종	규 격	단 위	수량		증.감	비고
			당 초	변 경
도로표지병	120*140*27mm	개	250	700	증) 450

라. 개략 공사비 산출                                      (단위:원)

공 종	규 격	단위	수량	공사비 및 자재비		증.감	비고
				단가	금 액
도로 표지병	120*140*27mm	개	250	6,105	1,526,250	증) 7,847,250	계약 단가
			700	13,391	9,373,700
도로 표지병 (관급비)	120*140*27mm	개	-	-	-	증) 11,690,000	조달 단가
			700	16,700	11,690,000
계						증) 19,536,750	제경비미포함

▶ 제경비 포함 도급비:(증)10,860,000원, 관급비:(증)11,690,000원

마. 시설관리공단 검토의견

○ 침투수 발생으로 인한 구조물 손상을 최소화 하기 위하여 방수층  파손을 방지할 수 있는 부착식 도로표지병 사용은 적정하다고 판단 됨.

○ 도로법 제38조 도로부속물 설치기준에 의거 도로표지병은 중앙선, 차선경계선, 전용차선, 노상장애물, 안전지대 등에 설치되어야 함.

○ 따라서 시공사에서 제출한 도로표지병 추가구간 수량 반영은 원활한 교통소통을 위하여 적정하다고 판단 됨.

○ 신규단가 접착제 단가산출(₩30,000원) 부분은 생산업체 제품특성을  고려한 (₩12,900원)으로 변경 적용함이 적정하다고 판단 됨.

■ 조치계획

○ 금회 시행한 반포천복개구조물 및 금천교 교면방수포장의 침투수 방지 및 교차로 안전사고 방지를 위한 부착식 도로표지병 설치는 타당 함으로 감독부서인 시설관리공단에 품질관리, 안전관리 철저 등 감독 업무에 철저를 기하여 공사 시행토록 통보 조치하고,

○ 공사실정보고에 따른 관급자재는 낙찰차액(211,934천원)을 사용하여 관리 단속과에 구매요청하고, 공사비 증가는 추후 설계변경시 공사비 잔액 및 낙찰차액 등 금천교외 1개소 보수공사 예산 범위내에서 공사비 반영토록 조치하고자 합니다.

붙임 : 시설관리공단 실정보고 관련서류 등 1부.  끝.