【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청서

(용허리공원 빗물저류조 설치공사)

대시민공개

시 행	방재시설부-12255
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자

주무관		치수시설과장	방재시설부장			결재
한종수		김흥근	11/26 임춘근
협 조

공 사 명	용허리공원 빗물저류조 설치공사	요청기관	도시기반시설본부 방재시설부
공사위치	서초구 서초동 1324-1번지 일원(용허리공원 내)
공사기간	2012. 12. 21 ~ 2014. 12. 31
계약금액 (최초계약 금액)	7,625,521,000원(5,590,280,000원)
공사개요	저류조 설치 V=15,000㎥, 유입관로 설치 L=220m
설 계 자	․상 호 : 한국종합기술 ․ 대 표 자 : 이강록 ․책임기술자 : 김창배 (전화번호 : *************)
발 주 자	․담 당 자 : 한종수 (전화번호 : 3708-8772)
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) - 용허리공원 빗물저류조 설치공사를 2012년 공사발주하여 12월 공사계약 함. - 2013. 12. 26 저류조 구조물 완료 하였음. - 2014년 4월과 7월 유지관리부서(서초구청) 합동 점검 시 요구사항 및 자문회의 결과(하천관리과) 반영 - 계약이후 2건의 변경사항에 대하여 설계내역을 심사 요청 함 (설계변경 대상 2건 209,900천원) ․ 지정폐기물 처리건(증65,000천원), ․ 토출관로 개선 반영(증144,900천원)
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(설계변경내역서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	서울특별시도시기반시설본부장