함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	공사변경계약체결통보[암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 정보통신공사 5차]

1. 생산부 기전설비과-7965(2014.11.25)호와 관련입니다.

2. 『암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 정보통신공사 5차』에 대한 변경계약을 별첨과 같이 체결하고 안내드리니 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 계약자 : ***************

나. 계약기간 (변경없음)

● 전체분 ’09.09.10.∼’14.11.25.

●  5차분 ’14.03.18.∼’14.11.25.

다. 계약금액                                            (단위:원)

구분	총차분	5차분	비고
당초	650,800,000	172,704,000
변경	684,181,000	206,085,000	증)33,381,000

라. 변경사유

- 5차분 준공에 따른 제경비 정산 및 공기연장에 따른 간접비 반영으로 인한 변경.

- 간접비 반영부분은 공기연장으로 인한 실제 현장에 투입된 근무자의 간접비로서 기존 도급액(공사비)부분과는 별도(일반관리비, 부가세, 이윤 등 미포함)로 지출되는 금액임(보고서 참조)

마. 계약보증금(보증기간 연장)

- 계약보증금 : 684,181,000원 (총금액의 10%)

- 보증기간 : 2009.09.10 ~ 2014.11.25

붙임 : 1. 공사변경계약체결통보서 1부.

2. 합의서등 각 1부.  끝.

	재무회계과장
★주무관	박은미		재무회계과장	11/26 조두업
협조자
시행	재무회계과-15286	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동27-1)	/
전화	02-3146-1232	/전송	02-3146-1209	/	shsarang@seoul.go.kr	/	부분공개