보    고    서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김재엽	최양주	11/26 이자원

명에 의거  2014년 방화1동외 10개동 상수도공사(연간단가계약) 시행중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2014.11.26.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 김재엽

보 고 내 용
건 명	준공기한 연기 보고(신설-75)
내용	□ 공사현황 ○ 위 치 : 강서구 방화동 241-5 학G5 마곡유치원 ○ 작업 지시번호 : 신설-75 ○ 당초 공사기한 : 2014.11.14. ~ 2014.11.23 ○ 변경 공사기한 : 2014.11.14. ~ 2014.11.30 □ 사 유 ○ 본 공사는 신축현장으로 수요가측에서 공사현장 일정으로 연기를 요청하여 공사기간을 연기하여 할 실정임. □ 조치의견 ○ 위와 같은 사항으로 수요가와 합의하여 급수공사를 2014.11.30.까지 연기하고자 합니다. 끝.
비 고